투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(무단횡단금지시설 구매)

우리 사업소에서 시행중에 있는 『2016년 교통소통개선사업』에 소요되는 관급자재를 아래와 같이 납품기한을 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

◦ 요청 사항

계약건명	계약번호	품 명	규 격	단위	수량	납품기한		변경 사유	비고
						당 초	변 경
무단횡단금지시설 구매(다해산업)	12-16-2-29088-01	차선분리대	차선분리대,다해산업개발,DHP-02,Ø80×2500×950nn,독립형	경간	34	2016.7.14	2016.9.30	교차로 포장정바구간으로 사용시기 미도래

끝.

	도로보수과장
주무관	홍수종		도로보수과장	07/11 국중진
협조자
시행	도로보수과-3185	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	대시민공개