		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(지장수목 제거 및 이식 관련 실정보고 승인 통보)

1.업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 한신공영(주), 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 (주)동일기술공사

2.작 성 일 자 : 2016-07-11 18:07:41

3.지 시 내 용:

1) 하남 제16-398(‘16.06.28)호와 관련입니다.

가.『하남선(5호선 연장)1-1공구 건설공사』와 관련 공사구간 내 저촉되는 지장수목 처리현황에 대해 사업관리단 의견과 같이 승인하오니,

나. 추가 공사비에 대해선 향후 우리본부 설계변경 자문 소위원회를 거쳐 설계에 반영하여 주시기 바랍니다.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							엄상민			주무관					정삼기					토목1과장					07/12 윤방식
협조자
시행			도시철도토목부-8850									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스9층															/
전화		772-7214						/전송			772-7306					/													/	대시민공개