문서번호	한양도성도감-6768
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	도성보존팀장		한양도성도감과장		문화기획관		문화본부장
김종범	황인		심말숙		양현미		07/12 고홍석
협 조
	주무관					최지애

한양도성 인왕산 성벽 붕괴구간

「성벽 정밀조사 및 보수방안 마련」용역시행 계획

2016. 7.

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	전문가 자문의견 반영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	안전조치 완료
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 국고보조금
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

한양도성 인왕산 성벽 붕괴구간

「성벽 정밀조사 및 보수방안 마련」용역시행 계획

한양도성 인왕산 정상부 성벽 붕괴구간 발굴 및 보존과학적 조사를 통해 진정성 있게 성벽을 보수하기 위하여 ‘성벽 정밀조사 및 보수방안’ 마련 용역을 추진하고자 함

Ⅰ		추진경위

□ `16.3.7 : 인왕산 정상부 성벽 체성과 여장 일부 붕괴(폭6.7m, 높이3.7m)

□ `16.3.7 : 전문가 현장자문(1차)

- 보수범위는 약30m(7타)로 하고, 지반조사 후 지반보강 판단

- 상부 여장하중이 직접 작용하지 않도록 보수

□ `16.3.9 : 문화재청(수리기술과) 합동점검

- 상부 여장 제거, 변형진행성 판단후 해체보수 범위 최소화 방안도 검토 필요

- 붕괴우려 인접구간 해체시 성돌의 재활용은 어려워보임

□ `16.5.13 : 전문가 현장자문(2차)

- 여장 11타 우선해체하고 우장막 설치

- 붕괴원인 규명을 위한 정밀조사와 축조기법 확인을 위한 발굴용역 추진

□ `16.6.2 : 성벽인접 전신주 철거완료

□ `16.6.17 : 추가붕괴 우려구간 여장 11타 제거완료

	그동안 주요 논의사항
ㆍ해체보수 범위·방법·시기 : 전문가 사이에서도 여장복원 여부, 해체보수 범위 등에 대해 다양한 의견이 있어 왔으며, 발굴 및 구조 확인 정밀조사 과정을 통해 보수 방안 마련에 대해 다시 논의하기로 함

Ⅱ		추진계획

□ 추진내용

○ 발굴조사를 통한 성벽 내탁부 확인 및 기록

○ 보존과학적, 구조 정밀조사를 통한 보수범위·방법 마련

○ 원형성돌을 최대한 재사용할 수 있도록 성벽보수 설계 실시

붕괴구간 발굴		보존과학적 구조 정밀조사		보수방안 마련 및 설계		성벽 보수공사
- 내탁부, 적심, 기저부 등 발굴조사 및 기록		- 지반 토질조사 - 면석 훼손상태, 강도조사 - 여장복원 여부에 따른 성돌 재사용 가능범위 시뮬래이션		- 해체보수 범위, 방법 마련 - 성벽 보수 실시설계 (내역서, 시방서 등 작성)		- 성벽 붕괴구간 및 주변 변형부위 보수정비 실시 (유실부 보충 및 해체보수)

「성벽 정밀조사 및 보수방안 마련」 용역추진

□ 주요 과업

① 내탁부 발굴조사

- 성벽 붕괴를 통해 태조구간 성벽 단면을 조사 할수 있는 기회로 내탁부 발굴 실시

- 기저부, 적심석, 뒤채움부 판축, 암반선 등 단면부 조사

- 발굴 내용 사진촬영, 모식도 작성 등 기록화

② 보존과학적 구조 정밀조사

- 보수 방향 마련을 위한 기초 데이터 조사 및 분석

- 지반 슬라이딩 여부 등 기저부 토질 역학적 조사

- 면석 훼손상태 조사, 성돌 재사용 유무 판단을 위한 구조역학적 검토

- 여장 복원 여부에 따른 성돌 재사용 범위 시뮬레이션

③ 보수방안 확정 및 설계

- 보수방향 결정 : 각종 정밀조사 내용을 바탕으로 보수 범위 및 방법 확정

- 보수 방안 마련결과를 토대로 실시 설계 실시

- 공사발주를 위한 설계도면, 내역서, 시방서, 수량산출서 등 작성

Ⅲ		용역발주

○ 용 역 명 : 한양도성 인왕산 성벽 붕괴구간 정밀조사 및 보수방안 마련

○ 입찰/계약방법 : 일반경쟁입찰 / 실적제한

○ 입찰참가자격

- 아래 ‘가’,  ‘나’, ‘다’ 분야별 자격 요건을 모두 갖추거나, 자격요건을 갖춰 공동응모 가능

가. 매장문화재보호 및 조사에 관한 법률 제24조에 의한 문화재조사기관으로 문화재청에 등록한 업체로서 한양도성 관련 발굴 실적이 있는 업체

나. 한양도성 보존 관련 정비계획 수립, 학술조사 등 연구실적이 있는 업체

다. 문화재 수리등에 관한 법률 제14조에 따라 문화재 실측설계업으로 등록을 필한 업체

○ 과업기간 : 계약 후 착수일로부터 9개월

○ 소요예산 :180백만원

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존 관리 활용, 한양도성 세계유산등재 및 시민 참여 활성화, 한양도성 학술조사 및 연구, 사무관리비(201-01)

Ⅳ		향후계획

□ 보수방안 마련 및 설계

○ `16. 7월 : 일상감사 및 계약심사

○ `16. 8월 : 입찰공고

○ `16. 9월 ~ `17. 3월 : 발굴 및 정밀조사, 보수설계안 마련

○ `17. 4월 : 문화재청 설계승인

○ `17. 5월 : 성과물 납품

○ `17. 6월 ~ : 공사 입찰 및 보수 추진

붙임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 용역비 산출내역 1부.  끝.