문서번호	방재시설부-10829
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	07/12 임춘근
협조
	주무관		代박계현

「경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)」

물가변동에 의한 계약금액 조정검토

2016. 07.

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)』

물가변동에 의한 계약금액 조정검토

「경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)」의 물가변동(제1회)반영에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : PSC-2016-524(2016.6.30.)호

Ⅰ

용역개요

□ 용 역 명 : 경춘선 폐선부지공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)

□ 내    용 : 공원조성(조경/토목/건축/기계/전기/정보통신/폐기물처리용역 등)

□ 용역기간 : 2015.04.13.~2017.6.10. (1차 : 2015.04.13.~2016.07.31.)

□ 용 역 비 : 1,188,900,000원 (1차 : 763,924,000원)

□ 용 역 사 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 등 4개사

Ⅱ

보고내용

□ 건설사업관리 용역 물가변동(제1회)반영검토

계약 체결 후 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격이 상승     또는 하락된 경우 그에 따라 계약금액을 조정함으로써 계약 당사자의      원활한 계약이행을 도모

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

- 동법 시행령 제73조 및 동법시행규칙 제72조

- 기술용역계약 일반조건 15조

○ 계약금액 조정대상 여부 검토

계약금액 조정요건 : 2가지 조건 동시 충족

- 계약체결일 이후 90일 경과

- 품목 및 지수조정률 3%이상(품목조정 적용)

○ 물가변동(제1회)금액 산출

구 분	검토내용	비 고
비교시점	2015.04.13	계약체결일
조정기준일	2016.01.01	계약 체결 후 90일 이상 경과
계약금액	1,188,900,000원
물가변동 제외대가	287,013,927원	2015.4.13. ~ 2015.12.31
물가변동 적용대가	901,886,073원	2016.01.01. 이후
물가변동 반영대가	933,549,332원
물가변동 조정금액	31,650,000원
물가변동율	3.51%

○ 공제금액 산출

구 분	검 토 내 용	비 고
선금	182,700,000원
물가변동 적용대가	901,886,073원	2016.01.01. 이후분
선금 지급비율	15.37%	(선금 / 계약금액) × 100
공제금액	4,864,000원	물가변동적용대가×물가변동율×선급비율

○ 물가변동(제1회)조정 반영금액(물가변동 조정금액-공제금액)

구 분	검 토 내 용	비 고
물가변동조정 반영금액	26,786,000원	물가변동조정금액-공제금액

Ⅲ

보고자 의견

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리 용역(2,3단계)』 물가변동으로 인한 계약금액조정건에 대하여 관련 규정에 의한 검토 결과, 타당한 것으로 판단되어 계약금액 조정 승인조치하고자하며, 향후 설계변경 시 반영하도록 건설사업관리기술단에 통보하고자 함.

붙  임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.