문서번호	녹지관리과-2947
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장		한강사업본부장
최수영	문경재	문길동		07/12 황보연
협 조

집중호우에 따른 꽃길 피해지역 정비계획

2016. 7.

한강사업본부

(녹지관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

집중호우에 따른 꽃길 피해지역 정비계획

`16.7.4~7.5 내린 집중호우 및 팔당댐 방류(11,901㎥/sec)로 인한 한강공원 침수와 관련하여 자전거길 및 산책로변 등 꽃길 피해지역을 조사하고 아래와 같이 정비코자 함

Ⅰ		꽃길 조성 현황

위    치 : 한강공원 주요 녹지대 및 자전거 도로변 등

규    모 : 면적 105,000㎡, 연장 23km

- 자전거도로·산책로변 13,564㎡, 녹지대·화분 16,536㎡, 전원풍경단지 74,900㎡

※ 호안녹화조성지 158,800㎡ 19km 별도

조성내용 : 초여름꽃 식재 및 파종

- 꽃묘식재 106,620본, 꽃씨 150kg파종(자체 보관분)

조성기간 : `16. 5. 25 ~ `16. 6.10

Ⅱ		꽃길 피해 현황

공원별	현황	비고
광나루	양호
잠 실	일부지역 침수(헬기장 삼거리~청담대교 하류)
뚝 섬	양호
잠 원	일부지역 침수(신잠원나들목~철탑)
반 포	전지역 침수(반포나들목~반포안내센터)
이 촌	일부지역 침수(동작대교~반포대교)
여의도	양호
양 화	양호
망 원	일부지역 침수(잠두봉~원효대교)
난 지	양호
강 서	전지역 침수(방화대교~마곡철교)

조사내용

조사결과

- 반포, 강서 등 저지대 공원지역 꽃길은 전지역 침수피해를 입었고, 잠실, 잠원, 이촌, 망원지역은 일부구간만 침수피해를 입음

- 침수피해가 없는 공원 일부지역도 생육상태가 불량하여 꽃길 정비 필요

- 초여름꽃 식재지인 녹지대(꽃밭) 및 화분은 대부분 상태 양호하나, 잦은 비 및 폭염의 반복으로 꽃 생육상태 예의주시 필요

- 전원풍경단지는 하반기 꽃씨파종 필요

Ⅲ		정비계획

정비대상 : 침수 피해지역 및 생육불량 지역, 전원풍경단지

규    모 : 면적 56,066㎡, 연장 16km

- 자전거도로·산책로변 10,801㎡, 녹지대·화분 5,465㎡, 전원풍경단지 39,800㎡

정비내용 : 꽃모식재 35,740본, 꽃씨파종 495kg

정비기간 : `16. 7. 12 ~ 7. 20

※ 장마 및 폭염으로 꽃 생육조건이 열악하여 기상상황 고려 식재

정비방법

- 꽃  길 : 꽃씨파종 및 꽃모식재

· 한강몽땅 행사지역 및 시민 다수이용지역은 꽃을 빨리 볼 수 있도록  꽃묘 보식 및 식재(백일홍, 금계국, 메리골드 등)

· 기타 지역은 꽃씨 재파종(코스모스, 황화코스모스, 백일홍)하여 가을까지 관상 유도

- 전원풍경단지 : 꽃씨 파종(코스모스)

※ 서래섬, 뚝섬지역은 메밀 파종예정지로 8월말 파종 예정

Ⅳ		소요예산

총 소요예산 : 31,885천원

- 꽃묘 식재 : 35,740본 / 20,220천원

· 금계국                  2,000본 × 2,850원/본 = 5,700천원

· 백일홍                  7,000본 ×   610원/본 = 4,270천원

· 메리골드, 베고니아 등  20,800본 ×   350원/본 = 7,280천원

· 백묘국                  5,940본 ×   500원/본 = 2,970천원

- 꽃씨 파종 : 495kg / 11,665천원

· 코스모스               402kg × 16,000원/kg  = 6,432천원

· 황화코스모스            25kg × 23,000원/kg  =   575천원

· 백일홍                  68kg × 68,500/kg    = 4,658천원

구매방법

- 꽃  모 : 동부공원녹지사업소 양묘장 꽃모 우선 구입 및 조달구매

- 꽃  씨 : 종자 취급 전문업체에 수의계약 구매

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 녹지시설유지관리, 재료비

Ⅴ		향후일정

2016. 7. 12           : 꽃묘 및 꽃씨 구매요청

2016. 7. 12 ~ 7. 13 : 폐화 정리

2016. 7. 13 ~ 7. 20 : 꽃묘 식재 및 꽃씨 파종

2016. 7. 20 ~        : 꽃길 유지관리

붙임 : 1) 호우피해 현황사진 1부.

2) 꽃묘 식재 및 꽃씨 파종대상지 1부. 끝.