투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경(총차 3회 및 2차 3회) 계약의뢰(강남순환4공구 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 「강남순환4공구 전기공사』 와 관련, 아래와 같이 설계변경 계약의뢰(총차, 2차 3회)하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 4공구 건설 전기공사(총차,2차)

2. 공사금액 : 2,114,166,780원(2차-1,266,723천원)

3. 시 공 사 : ㈜세흥건설외 1개사

4. 공사기간(변경없음) : ‘10.05.25 ~ ’19.11.30.(2차 : ~ ‘16.07.15.)

5. 공사금액 변경 현황

(단위:원)

구 분	계약금액	변경금액	증가	비고
총 차	2,114,166,780	2,250,600,000	136,433,220
1 차	50,000,000	50,000,000	-	준공
2 차	1,266,723,000	1,375,220,000	108497,000
향 후	797,443,780	825,380,000	27,936,220

6. 변경사유 : 신호등 경찰청 규제심의 반영 및 시흥대로, 서해접속도로 가로등 철거·설치에 따른 물량증감.

따로붙임 : 1. 설계변경 시행 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	건설총괄부장,서 울 특 별 시 장(재무과장)
주무관	곽용길		열빛총괄과장	유병기		설비부장	07/12 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-11054	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)