문서번호	박물관진흥과-6362
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건립지원팀장	박물관진흥과장
최기섭		최달수	07/12 임원빈
협조

「서서울미술관 건립 타당성 조사용역」

용역기간 연장 시행계획

2016. 7.

문 화 본 부

(박물관진흥과)

「서서울미술관 건립 타당성 조사용역」

용역기간 연장 시행계획

서서울미술관 건립 타당성 조사용역을 수행함에 있어 당초 용역기간에 미 반영되었던 타당성 검증 및 결과 반영에 소요되는 기간에 대한 용역기간을 연장하여 내실있는 용역추진에 만전을 기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서서울미술관 건립 타당성 조사용역

○ 용역기간 : 2015.12.24. ~ 2016.7.20.

○ 용 역 비 : 63,000,000원

○ 용역업체 : 숙명여자대학교 산학협력단(대표 : 천충일)

○ 주요 과업내용

- 서서울미술관 건립 타당성 조사

- 서서울미술관 건립 및 전시․운영 기본구상(안) 제시

- 건립 사전 절차 이행 자료 작성

□ 용역기간 연장(안)

○ 연장내용

계약금액	변경 없음
계약기간	당 초	2015. 12. 24. ~ 2016. 7. 20.
	변경후	2015. 12. 24. ~ 2016. 10. 18. (90일간 연장)
과업내용	변경 없음

○ 연장사유

- 당초 용역기간에 미 반영되었으나 건립 사전 이행 절차인 우리시 공공투자관리센터 타당성 검토 기간 및 결과 보완에 소요되는 기간 연장

□ 향후계획

○ 계약기간 연장 요청(→재무과) : '16. 7. 13. 한

- 재무과에 통보(합의각서 날인 후 첨부)하여 계약변경 조치

붙	임 :	합의각서 1부.  끝.