서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)
제목	월계~녹천 철도이설공사관련 현안사항 업무협의 회신

1. 건설총괄처-10784(2016.06.30.)호와 관련입니다.

2. 월계~녹천 철도이설공사와 관련하여 사업기간 연장 등 현안사항 업무협의와 관련하여 아래와 같이 회신하오니, 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사업기간 연장

- 당초: 2009.9.14. ~ 2016.12.31.

- 변경: 2009.9.14. ~ 2017.9.30.

나. 수탁사업관리비는 관련 자료 검토 후 별도 통보 예정

붙임: 경원선 이설 공사기간 검토 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백부현		도로시설계획팀장	한정무		도로계획과장	전결 07/12 하종현
협조자
시행	도로계획과-9779	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)2133-8083	/전송	02)2133-0763	/	buni1107@seoul.go.kr	/	대시민공개