투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(조명기구) 변경계약의뢰(개포디지털-전기공사)

1. 설비부-3575(2016.03.10)호와 관련입니다.

2. 위호로 계약된『개포디지털혁신파크조성 전면리모델링 전기공사』의 관급자재(조명기구)에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : LED매입등기구외 11종 구매(3자단가계약)

나. 변경내역                                        (단위:원)

납품요구번호	계약업체	당초	변경	증감
12-16-2-24976-00	에디슨솔라이텍	94,698,000	91,002,000	감3,696,000
12-16-2-24980-00		10,340,000	10,340,000	변경없음
12-16-2-24978-00	㈜솔라루체	3,047,000	3,980,000	증 933,000
12-16-2-24979-00	엘이디코람(주)	1,013,300	1,572,300	증 559,000
12-16-1-30467-00	정원엘피(주)	14,800,000	14,800,000	변경없음
12-16-2-24977-00	㈜말타니	9,002,400	9,002,400	변경없음
계		132,900,700	130,696,700	감2,204,000

다. 납품기한 : 2016. 08. 30

라. 변경사유 : 건축평면변경에 따른 조명기구 수량변경

마. 예산과목 : 경진본부 디지털산업과, 디지털산업육성지원과, 디지털산업 기반시설확충 및 지원, 개포디지털혁신파크조성, 시설비

따로붙임  1. 관급자재 변경내역서 1부.

2. 변경 방침서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김원태		시책사업과장	임현근		설비부장	07/13 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-11078	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개