투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재(아스콘) 수량변경 요청 (반포공원 교통개선 공사)

1. 우리과에서 시행하는“반포공원 교통개선 진출입 연결도로 정비공사”의 소요되는 관급자재에 대하여 이래와 같이 수량변경을 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 반포공원 교통개선 진출입 연결도로 정비공사

나. 요청내용

남품요구번호	품 명	규격	물 품 식별번호	단위	당초		변경		증 감
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
12-16-1 -03344-00	아스콘	#78	22535420	톤	498	25,094,220	618	31,141,020	120	6,046,800
12-16-1 -34076-00		#67	22535447	톤	276	13,311,480	416	20,063,680	140	6,752,200

다. 변경사유 : 설계변경에 따른 물량변경.   끝.

	시설관리과장
주무관	최규석		시설관리과장	07/14 代이윤성
협조자
시행	시설관리과-2082	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개