문서번호	하천관리과-10787
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
김재웅	김중영	이진용		07/14 권기욱
협 조

2017년 빗물펌프장 증설사업 추진계획 보고

2016. 07.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 빗물펌프장 증설사업 추진계획 보고

우리시 방재성능 목표기준인 30년 빈도(95mm/h) 확보를 위해   2017년 신규로 시행할 빗물펌프장 증설공사 및 설계용역에 대한   추진계획 보고임.

Ⅰ		추진근거

○ 빗물펌프장 증설 1단계 사업완료 보고(행정2부시장 방침 제139호-2014.4.18.)

○ 빗물펌프장 신․증설사업 추진현황 보고(하천관리과 1065호-2016.1.22.)

Ⅱ		신․증설 추진현황(2016. 7.)

계	공사중	설계 완료	계 획 수립중	미 시 행		비 고
				보류	취소
35	6	7	4	12	6

○ 공사중 6개소 : ‘16. 12월 3개소, ‘17. 6월 3개소 준공 예정

※ 보류 12개소(배수개선사업 4개소, 재개발사업 2개소, 사유지내 위치 2개소 등)는      사유 해소시 개별적으로 증설 추진

Ⅲ		2017년 사업계획(신규)

□ 빗물펌프장 증설공사

○ 사업대상 : 6개소(5개 자치구)

○ 사업기간 : 2017 ~ 2018년

○ 소요예산 : 50,603백만원(‘17년 14,167백만원)

○ 세부 사업내용

펌프장명	사 업 개 요	사업비(백만원)	설치년도	비고
상수	․배수펌프 증설 36㎥ ․집수정 증설 456㎥	6,472	1986년
당인	․배수펌프 증설 820㎥ ․집수정 증설 491㎥	10,111	1993년
박미	․배수펌프 증설 30㎥ ․집수정 증설 3,020㎥	4,312	2005년
염창1	․유수지 확충 2,160㎥ ․건축물 신축 965㎥	6,179	1993년
행당	․배수펌프 증설 600㎥ ․유수지 확충 7,000㎥	13,556	1993년
한남	․배수펌프 증설 1,360㎥ ․건축물 증축 512㎥	9,973	1970년
계		50,603

※ 신규 사업 6개소는 2015년 설계용역 완료하였으며, 1개소(잠원)는 잠원2

빗물펌프장 신설 후 착수

□ 기본 및 실시설계용역

○ 사업대상 : 4개소(3개 자치구)

○ 사업기간 : 2017. 1 ~ 12.

○ 소요예산 : 1,000백만원

○ 세부 사업내용

펌프장명	시설현황 (㎥/분)	증설규모 (㎥/분)	설계빈도	용역비 (백만원)	비 고
중곡	2,330	1,083	10년	600
신길	1,274	370	10년
증산	350	169	10년	400
영등포	885	665	10년
계	4,839	2,287		1,000

※ 2017년 설계용역 완료 후 ‘19년 착수 → ’20년 증설 완료 추진

□ 예산 투자계획(2017~2020년)

(단위 : 백만원)

계	2017	2018	2019	2020	비 고
82,503	14,167	33,057	10,584	24,695	증설 사업비

※ 행당빗물펌프장 리모델링 관련, LH공사 시 금고 예치금(3,379백만원 -‘12.12.) 별도

Ⅳ		사업 추진방법

□ 빗물펌프장 증설공사 발주 및 시행 : 자치구

○ 실시설계 및 시공․유지관리의 일관성과 수방기간 중 기존 시설물 운영        등 고려하여 자치구 시행.

※ 관련근거 : 하천관리과-12330(2014. 7. 31. 도시안전실장 방침)

□ 기본 및 실시설계용역 발주 및 시행 : 하천관리과

○ 설계업무의 효율성과 지역 특성, 시설물 유지관리 등을 고려하여 서울        시와 자치구 협의 시행.

Ⅴ		사업효과

□ 빗물펌프장 방재성능 향상

○ 2020년까지 103개소(85.8%) 30년 빈도 강우 대응능력 확보

- ‘16.12(88개소)→’17년(93개소)→‘18년(99개소)→’20년(103개소)

□ 시설물 안전성 개선 및 주민 불편사항 해소

○ 노후 시설물 보수․교체를 통한 시설물 운영 및 안전성 개선

○ 외관 디자인 개선, 안전시설 확충 등 주민 불편사항 해소

Ⅵ		향후 계획

○ 2016. 10 : 기술용역 타당성 심사 의뢰

○ 2016. 11 : 기술용역 발주 심의

○ 2016. 12 : 증설사업 추진 협의를 위한 자치구 관계자 회의

붙임 : 1) 빗물펌프장 신․증설 추진현황 1부.

2) 빗물펌프장 사업 보류․취소내역 1부.

3) 사업설명서 1부.  끝.