함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결보고[관내 경계순찰로 시설공사]

우리 센터에서 시행중인 공사에 대하여 변경계약을 체결하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 관내 경계순찰로 시설공사

나. 계약업체 : (주)이우티이씨, 대표 김 평

다. 계약변경 내역

1) 준공기한 : 2016.05.18 ~ 2016.07.16(변경 없음)

2) 계약금액

○ 당초 86,447,260원 → 변경 95,090,000원(증 8,642,740원)

3) 변경사유

○ 신규공종 및 시공물량 증·감 발생, 보험료 정산

라. 변경계약 일자 : 2016.07.13

붙임 : 1. 변경계약서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 변경계약 합의서 1부.

4. 증액 보증서 1부.

5. 서울시 공사계약 특수조건 1부.

6. 공사계약 일반조건 1부. 끝.

주무관	윤충용		행정관리팀장	권영철		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	07/14 차윤기
협조자
시행	정수운영과-9041	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화	02)3146-5312	/전송	02)3146-5309	/		/	부분공개(6)