문서번호	시설과-5257
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
남상국	김한준	07/15 이용태

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설폐기물처리용역』 설계변경 (총차 3회, 2차 1회) 및 2차분 계약 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

중부공원녹지사업소

(시  설  과)

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설폐기물처리용역』

설계변경 (총차 3회, 2차 1회)  및 2차분 계약 검토보고

「남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원 조성공사 건설폐기물처리용역」과 관련, 책임건설사업관리기술자의 설계변경 및 2차분 계약요청서가 접수되어 아래와 같이 보고드림.

□ 관련 근거

○ 한국건설관리공사 남산 회현 - 115호 (2016.6.7.) : 건설폐기물처리용역       설계변경서 자료 제출 및 2차분 계약요청

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원 조성공사                  건설폐기물처리 용역

○ 용역내용 : 운반 2,461㎥, 처리 5,774톤 (1차 운반 2,426㎥, 처리 5,690톤)

○ 용역기간 : 2015.3.26 ~ 2016.12.31 (1차 ‘15.3.26~’15.12.17)

○ 도 급 자 : 동광건설기계(운반) 대표 김철기, ㈜동우개발(처리) 대표 홍상표

○ 도 급 비 : 156,380천원 (1차 준공금액 154,150천원)

□ 추진경위

○ 2015. 3.26 : 계약 및 착수

○ 2015.11.10 : 설계변경(총차1회, 1차1회)

○ 2015.12. 7 : 설계변경(총차2회, 1차2회)

○ 2015.12.17 : 1차분 준공

□ 설계변경 및 2차분 계약 보고내용(책임감리)

○ 변경사유

- 분수대 기계실, 변압기 구조물 철거, 분수대 주변 포장깨기 추가, 신궁옹벽

석축 뒷채움부 콘크리트 철거 누락분 반영에 따른 변경

[관련근거 : 시설과-4760(2016.6.27.) 실정보고 승인]

○ 건설폐기물처리 변경내용

구 분			당 초	변 경	증 감	비 고
건 설 폐기물	총차	운 반	2,461㎥	3,095㎥	증) 634㎥
		처 리	5,774톤	7,259톤	증) 1,485톤
	2차	운 반	35㎥	669㎥	증) 634㎥
		처 리	83톤	1,568톤	증) 1,485톤

○ 용역기간 및 계약금액 변경

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
용역기간	총 차	2015.03.26. ~ 2016.12.31	2015.03.26. ~ 2016.12.31	변경 없음
	1차	2015.03.26. ~ 2015.12.17	2015.03.26. ~ 2015.12.17
	2 차	착수일로부터 ~ 2016.12.31	착수일로부터 ~ 2016.12.31
계약금액	총 차	156,380	195,789	증)39,409
	1 차	154,150	154,150	-
	2 차	2,230	41,639	증)39,409

○ 2차분 계약 내역

(단위 : 천원)

구 분	총 차	1차분 (준공)	2차분 (금회계약)	잔여분 (장래)
용역비	195,789	154,150	41,639	-

※ 2차 계약 주요내용 : 분수대 기계실, 변압기 구조물 철거, 분수대 주변 콘크리트               포장깨기, 신궁옹벽 뒷채움부 콘크리트 철거 누락분 반영

○ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 조경․토목공사 및 문화재공사시 발생된 폐기물 변경수량에 맞게 폐기물처리        용역 수량을 조정하여 반영하고,

- 또한, 추후 시공중 발생되는 건설폐기물은 수량 확인하여 추가 반영토록 함

□ 예산조치

○ 2016년도 남산공원 회현지구 정비 예산으로 시행

- 푸른도시국 공원조성과, 생활권 공원확충, 노후공원 재조성, 남산공원 회현 지구 정비, 시설비(401-01)

□ 보고자 의견

○ 책임건설사업관리기술자가 제출한 설계변경 및 2차분 계약 요청 내용이 적정한 것으로 판단되므로,

○ 공사계약일반조건 등 관련 규정에 의거 설계변경(총차3회, 2차1회) 및 2차분에 대하여 차수 계약을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1) 건설폐기물처리용역 설계변경서 자료 제출 공문 1부.

2) 변경 설계서(총차3회, 2차1회) 각 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.