문서번호	설비부-11258
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
★주무관	환경설비과장
김도형	07/15 여인웅

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사』

설계변경 소위원회 심의요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호	설비부 -	요청부서	건축설비과	요청일	2016. 07. 15.
공 사 명	마곡지구 재생수 공급시설 설치공사
감리개요	공사규모	재생수 공급 20,000㎥/일
	공사기간	2011. 11. 01 ～ 2016. 07. 31
	감 리 사	㈜도화엔지니어링외 1개사
	설 계 사	㈜동명기술공단종합건축사무소외 1개사
	시 공 사	(주)유호산업개발
심의요청 사 유	∘ 5,000만원 이상 설계변경(증액)
<설계변경 사유> ○ 서남환경 조경시설(생태연못, 홍보견학코스)에 관로를 신설하여 재이용수를 공급하기 위한 설계변경 <설계변경 금액> ○ 증 61,820천원(기계분야)
주 요 변 경 내 용
○ 재생수 공급배관 신설 - D50mm ×142m, D65mm ×296m ○ 수중펌프 설치 - 0.28㎥/일 × 20m × 1.5kw × 1대
별첨서류	1. 설계변경 심의 자료 1부(별첨).

건 명 : 서남물재생센터 공원 재이용수 공급관로 부설 공사

■ 현 황

계약명	마곡지구내 재생수 공급시설 설치 공사		시 공 자	(주)유호산업개발
공 사 규 모	○ 재생수처리시설 : 20,000㎥/일 ○ 관로공사 : 연장 1,343m 〇 기계공사 1식 〇 조경공사 1식	계 약 금 액	1차 996,000,000원 2차 1,589,844,000원 3차 2,799,000,000원 4차 1,669,196,000원 총차 7,054,040,000원			계약일
						2011.10.24 2012.03.15. 2013.03.26. 2014.12.04
공사기간	2011.11.01.~ 2016.07.31	감리자	㈜도화엔지니어링 ㈜유신		설계자	동명기술공단 동일기술공사
계약형태	공개경쟁입찰( ● ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사( )				※ 작성자 : 김도형 ☎ 3708-8619

■ 설계변경 개요

구분	공 종	설계변경개요	변경금액 (천원)	관련근거	비고
기계공사	기계설비공사	• 재생수 공급위한 급수관로 신설 (D60×142m, D65×296m) • 배수펌프 0.28㎥/min × 1대 신설 • 부대공사(ㄷ형강외) 1식	증)40,873	설비부-11176 (2016.07.14)
제 경 비			증)15,327
부 가 세			증) 5,620
설계변경 합계			증) 61,820

■ 설계변경 배경

○ 마곡지구 재생수 이용시설 감소 및 공사현장 여건 변동에 따른 계획 변경

○ 생산된 재생수의 안정적인 수요처 확보 필요

■ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	⑥
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 61,820천원 ② 감액 : 원 ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	⑨

※  해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경 경위

○ 설계변경 승인내용

- 설계변경 실정보고 【○】

- 설계변경 실정보고 승인통보 【○】

○ 설계변경 승인절차

- 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정심의) ➞ 설계변경 ➞ 변경계약 ➞ 공사시행