투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	최대전력관리장치 설치공사 준공기한 연장

1. 연구지원부-8929(2016.6.28.)호 및 연구지원부-8647(2016.6.22.)호와 관련입니다.

2. 최대전력관리장치 설치공사의 관급자재 납품 지연에 따라 다음과 같이 공사기간을 연장 하고자 합니다.

가. 계 약 명 : 최대전력관리장치 설치 공사

나. 계약금액 : **************************

다. 계약일자 : 2016.6.28.

라. 착공일자 : 2016.6.28.

마. 준공기한 : 2016.7.17.

바. 변경기한 : 2016.7.26.(9일 연장)

사. 변경사유 : 관급자재 납품업체(조달청 3자단가 제품)의 납품 지연

끝.

주무관	조성준		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	07/15 이형우
협조자	주무관	김지영
시행	연구지원부-10055	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 서울특별시 보건환경연구원	/
전화	02-570-3111	/전송	02-570-3320	/		/	대시민공개