투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 수량 및 납품기한 변경 요청(남부순환로~오정대로삼거리간도로개설공사)

우리 본부에서 추진중인 『남부순환로~오정대로삼거리간도로개설공사』와 관련하여 공사에 소요되는 관급자재의 수량 변경 및 납품기한을 아래와 같이 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

품 명	납품요구번호 (물품분류번호)	물품식별번호	규 격	단위	수 량 증·△감			비 고
					당초	변경	△감
레미콘	12-15-1-15972-00 (30111505)	10063090	25-18-80	㎥	351	351	-	부국레미콘 선일공업(주)
		10063092	25-18-150	㎥	113	113	-
		10063094	25-21-80	㎥	847	817	△30
		10063097	25-21-150	㎥	79	79	-
		10063099	25-24-80	㎥	350	350	-
		10063102	25-24-150	㎥	663	663	-
		10063106	25-27-150	㎥	260	260	-
		10063114	25-40-150	㎥	76	76	-
	12-16-1-11655-00 (30111505)	10063090	25-18-80	㎥	205	161	△44
		10063092	25-18-150	㎥	50	50	-
		10063094	25-21-80	㎥	150	-	△150
		10063097	25-21-150	㎥	300	294	△6
		10063099	25-24-80	㎥	20	4	△16
		10063102	25-24-150	㎥	80	3	△77

품 명	납품요구번호 (물품분류번호)	물품식별번호	규 격	단위	수 량 증·△감			비 고
					당초	변경	증·△감
아스콘	22-15-3-30397-01 (30111597)	22535444	표층용, WC-3	톤	2,969	2,802.81	△166.19	㈜인우이엔씨 삼덕유화(주) 영일물산(주)
		22535471	중간층, BC-1	톤	4,701	4,674.79	△26.21
		22535498	기층용, BB-2	톤	6,632	6,504.6	△127.4
	12-16-1-11859-00 (30111597)	22535444	표층용, WC-3	톤	1,200	1,200	0	세진아스콘(주) 납품기한 연장 기존 `16.6.30 변경 `16.8.30 시기미도래
		22535471	중간층, BC-1	톤	200	200	0
		22535483	기층용, BB-4	톤	200	200	0
		22535498	기층용, BB-2	톤	500	500	0

붙임 : 관급자재 변경구매요청서(레미콘, 아스콘) 각 1부.

확인서(레미콘, 아스콘) 각 1부. 끝.

	토목부장
주무관	김상도		광역도로과장	진재섭		토목부장	07/15 김영수
협조자
시행	토목부-14712	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	ironksd@seoul.go.kr	/	대시민공개