함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북송수관로 A, B열 이설관련 합동점검 등 추진일정 알림 및 협조요청

1. 북부간선도로상 강북송수관로 A, B열 이설관련입니다.

2. 『구리-포천 고속도로 민간투자사업』과 관련하여 공사구간인 북부간선도로상 매설된 강북송수관로 A, B열 이설공사중 A열 이설연결공사 추진을 위해 아래와 같이 관련부서 합동 현장점검 등 추진일정을 알려드리니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 강북송수관로 A, B열 이설공사 관련 합동점검 등 추진일정 및 협조요청

◦ 강북송수관로 A, B열 이설공사 공사개요

- 위  치 : 서울시 중랑구 신내동 7-7번지 일원(북부간선도로 구간)

- 시 공 사 : 서울북부고속도로주식회사 < ㈜대우건설 >

- 공사현황 : 강북송수관로 A, B열 이설(D2400mm×2열, L=772m)

◦ A열 이설연결공사 추진일정

- A, B열 이설공사 관련부서 합동 현장점검	’16. 7.18. ~ 20.

▶ 관련부서 : 배수과, 동부수도사업소 담당 및 직반장

- 이설연결공사 중 부족 공급량 대비 보충공급 급수운영	7.20. ~ 7.29.

▶ 공사기간중 강북 A열 공급부담 감소를 위해 A, B열과 강북 C열 연결관로 (묵동천 인근) 활용하여 C열에서 보충 공급 시행 <배수과, 북부수도사업소>

- 보충수 공급 밸브조절 및 급수운영 계획 협의를 위한 관련부서 합동 관계자회의 개최	7.26.

- A열 연결공사 사전 준비작업	7.20. ~ 8.9.

- A열 부단수 차단 및 연결공사	8.9. ~ 8.12.

◦ 관련부서 협조사항

- 이설공사 관련부서 ┏ 본부 생산관리과, 배수과, 급수운영과, 시설관리과

┗ 중부, 서부, 동부, 북부수도사업소, 강북정수센터

- 협조내용

▶ 강북정수장 공급수계 관련 배수지 항청소 및 시설보수 등 작업금지

< 관련배수지 :북악터널, 불광터널, 공릉, 월계, 월곡, 백련 등 >

▶ ┏ A열 이설공사가 원활히 추진될 수 있도록 D300mm 퇴수밸브 추가설치

┗ 이설공사 시,종점부의 관로 처짐 방지를 위한 관로받침 보호공 시공

< 수행업체 : 감리단, ㈜대우건설 >

※ A열 이설공사 완료 후 B열 이설공사도 조속히 추진토록 세부계획 수립 < 수행업체 >

따로붙임 : 강북 A, B열 이설공사 중 A열 이설연결공사(라인스토핑) 추진계획 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,급수운영과장,시설관리과장,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,강북아리수정수센터소장,(주)이산,(주)대우건설
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	07/15 이규상
협조자
시행	배수과-6335	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개