문서번호	방재시설부-10991
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	07/15 임춘근
협조

경춘선 폐선부지 공원조성공사

투명방음벽 설치에 대한 실정보고 검토

2016. 07

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사』

투명방음벽 설치에 대한 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」 시행 중 월계동구간 공원부지와철도차량 운행 구간 경계 차폐하기 위한 투명방음벽 설치 실정보고 검토임.

▶ 관련근거 : 선진경춘감-16-375(2016.6.22.)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’16.10.3 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.8.5)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 투명방음벽 설치 목적

- 월계동 공원부지 경계와 현재 철도차량이 운행 중인 광운대역 구간의 차폐 필요

- 공원이용객의 안전성 확보 및 경관 개선을 위해 투명 방음벽 설치

※ 투명방음벽 설치 예시

○ 투명방음벽 설치 개요

설치 위치	상세도

○ 수량 및 공사비 검토                                      (단위 : 천원)

구 분	공종명	단위	당 초		변 경		증 ․ △감		비고
			수 량	공사비	수 량	공사비	수 량	공사비
1. 부대공
토공		식			1	981	1	981
천공		m			75	2,062	75	2,062
H-FILE		ton			5,816	3,506	5,816	3,506
합판거푸집		㎡			186	4,991	186	4,991
문양거푸집		㎡			174	2,269	174	2,269
철근가공조립		ton			2.824	1,740	2.824	1,740
이형철근					2.824	1,248	2.824	1,248
콘크리트 타설					60.6	736	60.6	736
투명방음벽 설치		경간			29.0	3,846	29.0	3,846
투명방음벽 (자재)		경간			29.0	53,297	29.0	53,297
2. 직접공사비						74,676		74,676
3. 실시설계비		식			1	5,597	1	5,597
4. 제 경 비		식				25,776		25,776
5. 도 급 액						106,049		106,049
6. 관급자재
레미콘(25-21-120)		㎥	303		321
레미톤(25-24-150)		㎥	83		83

Ⅲ

건설사업관리기술단 의견

○ 경춘선 폐선부지 공원조성 공사(2단계) 시행 중 상기와 같이 공원조성 공사 시점부인 월계동 구간 투명방음벽 설치에 대한 실정보고 검토 결과, 시점부에 투명방음벽을 기존 철도용 방음벽과 연결 설치하여 광운대역의 철도차량 운행구간으로의 공원이용객 출입 제한으로 공원이용객의 안전성을 확보하고, 공원의 경관 개선을 도모함이 적정할 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 월계동 공원부지와 현재 철도차량이 운행 중인 광운대역 구간의 경계부에 투명방음벽 설치하여 공원이용객의 안전성 및 공원 경관 개선함이 타당하여 투명방음벽 설치 실정보고 승인 통보코자 하며,

○ 서울시 공원시설 색채디자인 가이드 라인에 따라 투명방음벽 지주는 서울 기와 진회색으로 도장 지시 코자 함.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.