문서번호	치수과-8820
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장
이은주	유연춘	송기민	07/15 김화복
협 조

사업예산 활용계획 및 준공기한 연기 검토 보고

- 성북동 1-2~2-5간 외 1개소 하수관로 설치 및 개량공사 -

2016.07.

안전건설교통국

(치  수  과)

사업예산 활용계획 및 준공기한 연기 검토 보고

- 성북동 1-2~2-5간 외 1개소 하수관로 설치 및 개량공사 -

Ⅰ		사 업 개 요

공사개요

- 공 사 명 : 성북동1-2~2-5간외 1개소 하수관로 설치 및 개량공사

- 공사기간 : 2016.04.21. ~ 2016.07.19.

- 도 급 자 : 프라도건설(주)  대표  이내교

- 총공사비 : 408백만원

· 도급비 253백만원, 관급비 69백만원, 이전비 86백만원

- 공사내용

· 하수관 개량 : D=250~450mm, L=332m

· 맨홀 신설 및 개량 : N=17개소

· 빗물받이 신설 및 개량 : N=41개소

용역개요

- 용 역 명 : 성북동1-2~2-5간외 1개소 하수관로 설치 및 개량공사 건설폐기물처리용역

- 용역기간 : 2016.05.09. ~ 2016.07.17.

- 도 급 자 : 남부이앤티(주)  대표 이격

- 용 역 비 : 32백만원

- 용역내용

· 건설폐기물 운반 : 552㎥

· 건설폐기물 처리 : 폐콘크리트 1,030톤, 폐아스콘 173톤

Ⅱ		보 고 내 용

장위로 11길47일대 노후 하수관로 개량공사는 서울시 주민참여예산사업으로 장위동 219-392~219-446구간(L=168m) 공사 시행중이며 주변 일대는 장위13재개발 해제구역으로 하수관로가 매우 노후하여 도로동공이나 침하발생 등 사고발생 우려가 있는 정비가 시급한 지역으로 장위동 219-446~219-31구간(D=450mm, L=60m)에 대하여 본 사업구간에 포함하여 시행하고자 함.

성북동 1-2~2-5 구간은 도로폭이 불규칙하고 종단경사가 8%이상 급경사인 굽은 도로이며 장위동 219-39~219-41 구간은 어린이보호구역내 도로폭이 협소한 급경사 도로로 미끄럼방지, 주행안정성을 향상하여 차량사고 예방 및 보행안전을 위하여 당초 계획된 미끄럼방지포장에 종방향 그루빙공법을 적용 시행하고자함.

- 성북동 1-2~2-5구간 : L=164m, B=4~6m, A=720㎡

- 장위동 219-39~219-41구간 : L=60m, B=3~4m, A=200㎡

< 그루빙 시공 예시 >

하수관로 공사 시행중 발생하는 민원에 대한 주민의견 수렴 등 민원처리와 6~7월 우기철 강우로 인해 공사가 지연됨에 따라 절대공기 부족으로 시설공사 및 건설폐기물처리용역의 준공기한을 연기하고자 함.

- 준공기한 연기 내역

구 분	준공기한		비고
	당 초	변경후
시설공사	2016.07.19.	2016.08.16.
건설폐기물처리용역	2016.07.17.	2016.08.16.

- 귀책소재 : 우리구

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		소 요 예 산

소요 공사비 : 69,600천원

공사비 산출근거

- 그루빙 시공 : 920㎡ × 30,000원/㎡ = 27,600,000원

· 성북동 1-2~2-5구간 : A=720㎡

· 장위동 219-39~219-41구간 : A=200㎡

- 하수관로 개량 : 60m × 700,000원/m =42,000,000원

· 장위동 219-446~219-31 : D=450mm, L=60m

Ⅳ		조 치 계 획

상기와 같이 사업계획 변경에 대하여 도급업체에 작업지시하여 시행하고 소요공사비는 사업예산중 가용금액(71,728천원)을 활용하여 추후 설계변경에 반영, 정산처리하고자 하고,

- 이전비(37,508천원), 낙찰차액(29,484천원), 사업비 잔액(4,736천원)

재무과에 하수관로 신설 및 개량공사와 건설폐기물처리용역의 준공기한 연기 의뢰하고자 함.

붙 임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.