문서번호	치수과-8834
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장
이은주	유연춘	송기민	07/15 김화복
협 조

사업예산 활용계획 및 준공기한 연기 검토 보고

- 보국문로 168일대 원형관로 보수보강공사 -

2016.07.

안전건설교통국

(치  수  과)

사업예산 활용계획 및 준공기한 연기 검토 보고

- 보국문로 168일대 원형관로 보수보강공사 -

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 보국문로 168일대 원형관로 보수보강공사

공사기간 : 2016.04.20. ~ 2016.07.18.

계 약 자 : 알케이건설  대표  노창근

총공사비 : 1,109백만원

- 도급비 1,068백만원, 관급비 21백만원, 이전비 20백만원

공사내용

- 원형관로 보수보강(비굴착 전체보수) D=900~1200mm, L=1,333m

- 하수관로 개량 D=250~900mm,  L=92m

Ⅱ		보 고 내 용

솔샘로6가길15 앞 도로동공으로 현장 확인한 결과 하수박스(1.5×1.5m)와 하수박스(1.2×1.2m) 사이에 THP하수관(D=1200mm)이 사유지를 통과하여 설치되어 있고 하수박스와 THP하수관 접속부, 하수관 연결부 이격으로 하수누수, 도로동공, 침하 발생한 상황으로 긴급보수가 필요하여 사유지내 기존 하수관은 폐쇄하고 도로에 흄관(D=1200mm, L=17m)을 매설하고자 함.

보국문로16가길76 앞 도로침하가 발생하여 현장 확인한 결과 기존 하수관(D=900mm, L=28m)은 매설한지 30년 이상된 매우 노후한 1m규격의 단관으로 연결부 이격부분에 하수누수, 토사유실 등으로 도로침하가 발생하여 하수관로 개량을 하고자 함.

하수관로 보수보강공사 시행중 발생하는 민원처리와 6~7월 우기철 강우로 인해 공사가 지연되었고 상기의 하수관로 긴급보수 추가공사 시행에 따른 절대공기 부족으로 공사준공 기한을 연기하고자 함.

- 준공기한 연기 내역

공사명	준공기한		비고
	당 초	변경후
보국문로 168일대 원형관로 보수보강공사	2016.07.18.	2016.08.16.

- 귀책소재 : 우리구

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		소 요 예 산

소요 공사비 : 98,500천원

공사비 산출근거

- 정릉동 솔샘로6가길15 구간 : 흄관부설 (D=1200mm, L=17m)

· 17m × 2,500천원/m = 42,500천원

- 정릉동 보국문로16가길76 구간 : 흄관부설 (D=900mm, L=28m)

· 28m × 2,000천원/m = 56,000천원

Ⅳ		조 치 계 획

상기의 하수관로 개량공사에 대하여 도급업체에 작업지시하여  『보국문로168일대 원형관로 보수보강공사』 포함하여 시행하고 소요 공사비는 본 사업예산중 가용금액(낙찰차액 145,384천원)을 활용하여 추후 설계변경에 반영, 정산처리 함.

재무과에 보국문로 168일대 원형하수관로 보수보강공사의 준공기한 연기 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.