투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약체결알림(최대전력관리장치 설치 공사)

1. 연구지원부-10055(2016.07.15.)호와 관련입니다.

2. 『최대전력관리장치 설치 공사』 공사기간 연장에 따라 아래와 같이 변경계약이 체결되었음 알려드립니다.

가. 건     명 : 최대전력관리장치 설치 공사

나. 계약방법 : 수의계약

다. 계약금액 : 금17,117,000원(금일천칠백일십일만칠천원)

라. 변경내용 : 공사기간 연장

- 당초준공일 : 2016. 7. 17

- 변경준공일 : 2016. 7. 26(9일연장)

마. 변경계약일자 : 2016. 7. 15.

바. 변경계약사유 : 관급자재 납품지연에 따른 공사기간 연장

사. 계약상대자

1) 주     소 : 서울특별시 동대문구 장한로 18

2) 상     호 : 원앤원산업개발(주)

3) 대  표  자 : 배애순

붙     임 : 1. 변경계약서 1부

2. 변경계약요청 공문 1부.  끝.

주무관	김지영		경리팀장	최동철		연구지원부장	07/18 代손광언
협조자	주무관	조성준
시행	연구지원부-10103	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30	/
전화	02-570-3341	/전송	02-570-3320	/	pyxis520@seoul.go.kr	/	부분공개(6)