투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 통보[수도권고속철도(수서~평택) 제1-1공구 노반신설 기타공사 환승연결통로구간 교통안전시설물 설치공사)

1. 도로보수과-5809(2014.10.08.)호, 수도권고속철도건설단-1826(2014.01.15.)호, 수도권고속철도건설단-1826(2016.02.03.)호, 도권고속철도건설단-9945(2016.07.05.)호와 관련입니다.

2. 『수도권고속철도(수서~평택) 제1-1공구 노반신설 기타공사』 원인자부담  교통안전시설물 설치공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니,

3. 원인자는 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

공사명	구분	설계사	감리사	시공사	원인자	공사기간	비고
수도권고속철도(수서~평택)제1-1공구 노반신설 기타공사	노면표시	㈜건영이앤씨	㈜건영이앤씨	㈜창희이엔에스	한국철도시설공단	당초: ‘14.10.22 ~ '16.06.30 변경: ‘14.10.22 ~ '16.12.20

나. 변경사유 : 수도권고속철도 잔여공사를 위한 기한 연장.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	한국철도시설공단이사장,서울수서경찰서장(교통과장),강남구청장(교통정책과장)
주무관	정용재		주무관	송광석		도로보수과장	07/18 김환겸
협조자
시행	도로보수과-6213	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0356	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개