문서번호	급수운영과-13578
결재일자	2016.7.18.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
조봉구	임인택	07/18 전명수
협 조

급수공사 연기 보고(가락동 13-8, 오금동 101-5)

명에 의거 마천동외 14개동 상수도공사 담당업무 수행중 아래와 같은 사유가 발생하여 조치계획을 보고합니다.

1. 공사 현황

○ 공 사 명 : 2016년 마천동외14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 계약상대자 : 제일토건㈜  대표 맹흥재

○ 급수공사 기한 연기 내역

지시번호	공사위치	공사개요	기존 공사기간	급수공사연기	연기사유
신설-30	오금동 101-5	구경 25㎜, 연장 4m	7.8~7.18	~2016.7.30	신축공사현장 지연
신설-31	가락동 13-8	구경 40㎜, 연장 4m	7.8~7.18	2016.7.30	신축공사현장 지연

2. 지체상금 부과여부 : 급수공사 수요가 요청으로 인한 급수공사 연기건이므로 지체상금 미부과코자 함.

3. 조치내용

- 상기와 같이 수요가에서 급수공사일정 연기를 요청함에 따라 변경된 공사 기간을 제일토건(주) 대표 맹흥재에게 통보코자 합니다. 끝.