보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	송여진	이경희	07/18 최철민

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여 급수공사 업무수행 중 급수공사 연기신청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현  황

작업지시 번호	위 치	작업승인 공문	비 고
개량-48	신림동 470-13	급수운영과-15404(2016.07.06.)
신설-79	신림동 1581-24	급수운영과-15148(2016.07.04.)
신설-80	신림동 1635-53	급수운영과-15778(2016.07.11.)

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 작업지시를 하였으나, 현장 공사준비미흡(자재적치)로 인하여 부득이 공사연기가 필요한 실정임

- 연기기간 약 30일간

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 계획

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
개량-48	2016.07.07.~07.22.	2016.07.07.~08.31.
신설-79	2016.07.11.~07.25.	2016.07.11.~08.31.
신설-80	2016.07.12.~07.26.	2016.07.12.~08.31.

붙임 : 상수도공사 연기원 3부(별도첨부).  끝.