함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	뚝도 공사기간 연장에 따른 건설관리용역 기간 연장 검토 요청

1. 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사가 당초 공사준공이2016.12월에서 약 7개월가량 연장이 예상됨에 따라 상기공사 건설관리용역 기간에 대하여 아래와 같이 연장 검토를 요청하오니 그 결과를 7.26일(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 뚝도 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설관리용역

나. 용역기간 : 당초 – 2009 ~ 2017. 4

변경 – 2009 ~ 2017. 7

다. 검토사항 : 당초 용역기간보다 3개월 증가함에 따라 용역비 증가없이                            감리자 투입조정으로 용역기간 3개월 연장 검토. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	송병욱		시설과장	김도섭		시설안전부장	07/18 강신재
협조자
시행	시설과-6487	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1435	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개