“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-17689		주무관	치수팀장		치수과장		안전교통국장
			정영상	강태근		代강태근		전결 07/18 박은섭
등록일자	2016.7.18.
결재일자	2016.7.18.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		행정국장		이창훈
					재무과장		정한호
					계약팀장		엄선회

-삼성1배수분구 하수관거 종합정비 건설사업 관리용역-시비사업

설계변경(총차1회) 및 용역기간 연장 시행계획

□ 관련근거

- 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속) 「설계변경(총차5회, 3차

1회) 및 공기연장 시행계획」(치수과-14530호, 2016.6.14.)

□ 설계변경 및 공기연장 사유

- 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속) 공기연장에 따른 건설사업 관리용역 설계변경(총차1회) 및 용역기간 연장

□ 용역비 증·감 현황(총차 1회)

구 분	계약금액	변경금액	증 ․ 감
용 역 비	1,072,313,000원	1,072,313,000원	0

□ 준공 연기기한

- 총차 : (당초) 2014.9.22 ~ 2017.3.9 → (변경) 2014.9.22 ~ 2017.12.31

□ 조치계획

- 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사 공기연장에 따른 해당 건설사업 관리용역에 대하여 설계변경(총차1회) 시행 및 공기연장 처리코자 함.

2016.  7.    .

	강 남 구
(		치수과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속) 설계변경(총차 5회, 3차1회) 및 공기연장 시행계획
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 거주민 및 시민다수
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ● ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	•
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 삼성1배수분구 하수관거 종합정비 건설사업 관리용역 -

설계변경(총차1회) 및 용역기간 연장 시행계획

『삼성1배수분구 하수관거 종합정비 건설사업 관리용역』 시행과 관련하여 시행중인 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속) 공기연장에 따른 건설사업 관리용역 설계변경(총차1회) 및 용역기간 연장 검토 보고임.

Ⅰ	관 련 근 거

삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속) 「설계변경(총차5회, 3차1회) 및 공기연장 시행계획」(치수과-14530호, 2016.6.14.)

Ⅱ	사 업 개 요

용 역 명 : 삼성1배수분구 하수관거 종합정비 건설사업 관리용역

용역기간 : 2014.9.22. ~ 2017.3.9.

용역규모

- 건설사업기술관리자(고급) 81.25(인·월), 기술지원기술자(고급) 7.01(인·월)

용 역 비 : 1,072,313,000원(시비)

용 역 사 : 동부엔지니어링(주) ******

Ⅲ	보 고 내 용

설계변경(총차1회) 및 용역기간 연장 시행

- 삼성1배수분구 내 침수피해 방지를 위하여 서울시에서 시비예산을 지원 받아 우리구에서 시행 중인 “삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속)”와 관련, 하수관거 시설공사가 시비 지원 부족으로 공기연장(2017.12.31.준공)을 시행함에 따라 “삼성1배수분구 하수관거 종합정비 건설사업 관리용역”에 대하여 사업비 범위내에서 설계변경(총차1회) 및 용역기간 연장 시행

주요 설계변경 내용

❍ 주요 증·감 현황

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총차1회	건설사업관리기술자 (고급) 81.25 인·월	건설사업관리기술자 (고급) 79.91 인·월	(감)1.34인·월
	사무원급료 30개월	사무원급료 35.3개월	(증) 5.3개월

❍ 용역비 증·감 현황

구 분	계 약 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
용 역 비	1,072,313,000원	1,072,313,000원	0

준공 연기기한

- 총차 : (당초) 2014.9.22 ~ 2017.3.9 → (변경) 2014.9.22 ~ 2017.12.31

년도별 서울시 예산배정 현황                          (단위 : 천원)

구 분	합 계	2014년 (준공)	2015년 (준공)	2016년 (시행중)	2017년 이후	비 고
감리비	1,072,313	130,000	160,000	165,000	617,313

Ⅳ	조 치 계 획

상기 보고내용과 같은 사유로 “삼성1배수분구 하수관거 종합정비 건설사업 관리용역” 설계변경(총차1회) 시행 및 용역기간을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

- 총차 : (당초) 2014.9.22 ~ 2017.3.9 → (변경) 2014.9.22 ~ 2017.12.31

- 귀책사유 : 우리구

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 1. 설계변경(총차5회, 3차1회) 및 공기연장 시행계획 1부.

2. 설계변경내역서(총차1회) 1부. 끝.