투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	구리암사대교 도로관리초소 공정관리 철저 요청

1. 우리시 시정발전에 협조하시는 귀사에 감사드립니다.

2. 귀 사가 우리본부와 계약하여 시공하고 있는 구리암사대교 도로관리초소의 건축공사는 현재 2층 벽체 및 기둥 골조공사 진행 중으로 계획공정(54.6%)대비 실적공정(17.2%)이 상당기간 지연되고 있습니다.

3. 작업단계의 검측업무에서 반복지적 및 협력사의 관리 통제부족 등 품질관리, 공정관리가 제대로 이행되고 있지 않아 공정지연이 발생된 것으로 보여집니다.

4. 원할한 공정관리를 위하여 특단의 공정만회대책을 수립하여 2016. 7. 25까지 우리본부(건축부)로 기일지켜 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	현대건설 대표이사 장수현 귀하(03058 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)),현대건설 현장소장 송근호 귀하(11946 경기도 구리시 이문안로 158 (토평동))
주무관	김연석		건축관리과장	곽동호		건축부장	전결 07/19 김진용
협조자
시행	건축부-9481	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개