문서번호	계약심사과-12226
결재일자	2016.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	심사총괄팀장	계약심사과장		재무국장
임장경	박창석	김성규		07/19 代서영관
협 조

건설공사 품질향상 및 예산절감을 위한 ’16년 설계경제성 상반기 운영실적 및 하반기 심사계획

2016.7

재  무  국

(계약심사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사 품질향상 및 예산절감을 위한

’16년 설계경제성 추진실적 및 하반기 심사계획

’16년부터 50억원이상 대형 건설공사를 포함한 설계경제성(VE) 심사를 시행하고 상반기 운영실적을 보고드림

※ 추진근거 : 행정1부시장 방침 제41호, ’16.2.15

		’16년도 심사계획

□ ’16년 설계경제성 심사대상 : 20개 사업

○ 100억원 이상 : 5개 사업

○ 50억원 ~ 100억원 미만 : 15개 사업

		’16년 상반기 추진실적

□ 설계VE 심사 : 7건, 1,448억원 심사, 86억원 절감

○ 100억원 이상 건설공사 2개 사업을 심사하여 53억원 예산절감

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	비 용			가 치
		공사비	절감액	절감율	원안	대안	향상율
1	세종대로 일대 역사문화특화공간	21,406	845	3.9%	500	616	23.2%
2	서남물재생센터 총인 처리시설 설치	82,672	4,455	5.4%	500	632	26.4%

○ 50억원~100억원 건설공사 5개 사업을 심사하여 33억원 예산절감

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	비 용			가 치
		공사비	절감액	절감율	원안	대안	향상율
1	양재대로 녹지연결로 조성사업	5,691	314	5.3%	500	560	12.1%
2	위례동 복합청사 신축공사	7,943	98	1.2%	500	887	77.4%
3	중랑천 초안산앞 보행교량 설치사업	8,124	411	5.1%	500	550	10.1%
4	시흥천 단면 확장공사	9,703	2,344	24.1%	500	753	50.6%
5	용두문화 복지센터 건립공사	9,058	144	1.6%	500	701	40.1%

□ 설계VE 전문성 제고를 위한 교육 실시

○ 설계VE 검토위원 참여를 위한 전문기관 교육참여

- 교육기관 :한국건설 VE연구원 교육과정 수강

- 기간/장소 : ’16.6.29~7.1(3일간), 인재개발원

- 대    상 : 계약심사과 신규전입자 10명

〈설계VE 이론 강의〉		〈참여 수업〉

□ 설계VE 심사위원(외부전문가) 확대 운영

○ 심사건수 증가 및 원활한 외부전문가 참여를 위하여 외부전문가 Pool 확대(72명→142명)

□ 심사 대상사업 조정 필요

○ 사업지연, 공사금액 축소에 따라 설계VE 심사곤란 :4개 사업

연번	사업부서	사 업 명	공사비 (백만원)	제외사유
1	도로계획과	잠실대교 미 천호대교 남단주변 연결체계개선	46,727	사업 지연(9월→17년)
2	도로계획과	태릉~구리IC간 광역도로 건설	136,800	사업 지연(9월→17년)
3	강동구청	암사1동 복합커뮤니티 센터 조성	8,600	사업비 축소(50억원 미만)
4	은평구청	소규모 청소년 복합센터 건립	7,856	사업비 축소(50억원 미만)

⇒ 발주부서의 지속적인 설계VE 심사 요청과 ’16년 설계VE 추진목표를 고려하여 하반기 심사대상에 추가

		’16년 하반기 심사계획

□ 심사 대상사업 추가 : 100억원이상 건설공사 4개 사업

○ 희망부서, 공사금액, 심사일정 등을 고려하여 ’16년 하반기에 포함하여 심사

연번	사업부서	사 업 명	공사비 (백만원)	심사 예정시기	선정사유
1	공공재생과	남산예장자락 재생사업	38,680	8월	市 중점사업
2	도시기반시설본부	올림픽대로 하부 미연결구간	12,458	9월	유사 대표사업
3	도시기반시설본부	대청지하차도 설치공사	55,700	10월	대형 건설공사
4	상수도사업본부	입상활성탄 재생시설 건설	19,820	11월	市 중점사업

※ 연초 설계경제성 심사를 계약심사과로 요청한 사업(24개) 중에서 자체 심사완료(예정) 대상사업을 제외하고 공사성격, 일정을 감안하여 선정

□ ’16년 설계VE 실적 홍보 추진

○ 상반기 설계VE 완료한 7개 사업에 대하여 성과 홍보

		행정 사항

○ ’16년 설계VE 심사대상 통보(3개부서, 4개사업) ---------- 7.21

○ 상반기 설계VE 관련 보도자료 제공 -------------------- 8월중

붙   임 ’16년 설계경제성(VE) 추진현황 1부. 끝.

’16년 설계경제성(VE) 추진현황

【심사완료 7건】

(단위 : 백만원)

연번	발주기관		공사 분야	사 업 명	공사비	심사 시기	비 고
1	사업소	도시기반시설본부	토목	양재대로 녹지연결로 조성	5,961	2월
2	자치구	송파구청	건축	위례동 복합청사 실시설계 용역	7,943	2월
3	사업소	도시기반시설본부	토목	중랑천 초안산앞 보행교량 설치	8,124	3월
4	자치구	금천구청	토목	시흥천 단면 확장공사	9,703	3월
5	자치구	동대문구청	건축	용두문화복지센터 건립공사	9,058	3월
6	본청	공공재생과	건축	세종대로 일대 역사문화특화공간 조성	21,406	3월
7	본청	물재생시설과	토목	서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치	82,672	5월
				계 (7개)	144,867

【심사예정 13건】

(단위 : 백만원)

연번	발주기관		공사 분야	사 업 명	공사비	심사 예정시기	비 고
1	자치구	서대문구청	토목	단절된녹지축 연결사업	6,336	8월
2	자치구	광진구청	토목	광나루역 환승주차장 건설 공사	8,377	8월
3	본청	공공재생과	건축	남산예장자락 재생사업	38,680	8월	신규
4	사업소	도시기반시설본부	토목	양재대로 지하차도 기본 및 실시설계	201,500	9월
5	자치구	마포구청	건축	공덕동 공영주차장 및 봉제지원센터	7,638	9월
6	투자출연기관	(재)세종문화회관	건축	세종문화회관 블랙박스극장 조성 공사	7,138	9월
7	자치구	송파구청	건축	청소년 문화의 집 실시설계 용역	6,771	9월
8	사업소	도시기반기설본부	토목	올림픽대로 하부 미연결구간-2단계	12,458	9월	신규
9	사업소	상수도사업본부	토목	우면산가압장 급수체계 개선	8,500	10월
10	사업소	도시기반기설본부	토목	대청지하차도 설치공사	55,700	10월	신규
11	자치구	양천구청	토목	신월3동 주택가 공동주차장 조성	9,570	11월
12	사업소	상수도사업본부	토목	입상활성탄 재생시설 건설공사	19,820	11월	신규
13	본청	물재생시설과	설비	탄천물재생센터 슬러지 자체처리시설	9,502	12월
				계 (13개)	391,990

【심사취소 4건】

(단위 : 백만원)

연번	발주기관		공사 분야	사 업 명	공사비	제외사유
1	본청	도로계획과	토목	잠실대교 및 천호대교 남단주변 연결	46,727	사업지연(17년상반기)
2	본청	도로계획과	토목	태릉~구리IC간 광역도로 건설	136,800	사업지연(17년상반기)
3	자치구	강동구청	건축	암사1동 복합커뮤니티센터 건립공사	8,600	공사축소(50억원이하)
4	자치구	은평구청	건축	소규모 청소년 복합센터 건립	7,856	공사축소(50억원이하)
				계 (4개)	199,983