문서번호	총무과-24937
결재일자	2016.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		임철수	07/19 정상택
협 조
	주무관			김광찬
	주무관			장병선

『2016년도 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가)』

기성금 신청(1차)에 따른 검토 보고

2016. 7

행  정  국

(총무과)

『2016년도 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가)』

기성금 신청(1차)에 따른 검토 보고

우리 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가) 추진 중 시공사로 부터

기성금 지급 요청에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년도 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : ‘16.2.12 ~ 12.31

○ 계약금액 : 금220,229,850원(금이억이천이십이만구천팔백오십원)

○ 계약업체 : ㈜금정엔지니어링,  박종화

○ 공 정 률 : 계약금 대비  75.04%

□ 근거

○ 지방자치단체를당사자로하는 계약에관한법률제18조 및 동법시행령제67조

○ 서울특별시 재무회계 규칙

□ 추진경위

○ 2016.  2. 12. : 공사계약 및 착공

○ 2016.  7.   7. : 제1회 설계변경 시행 (금액변경 없음)

○ 2016.  7. 11. : 기성금(제1차) 신청

○ 2016. 12. 31. : 준공예정

□ 공사 추진내용

(단위 : 천원)

차수	공사명	위치	금액
직접비	자판기 직결급수 연결작업	본관 11층 흡연실 앞	976
	급배수 씽크, 식기세척기	청계별관 10층	5,207
	소방헤드 설치 등(150개)	남산1별관 4층	9,316
	태양열 축열조 순환배관	본관 지하5층	7,440
	냉난방 공조기 덕트변경공사	본관 지하2층 (청사관리실, 통신실, 시민청사무실 등)	7,760
	시민청내 사무실 이전공사(2개소)	본관 지하2층 (소방,디퓨져,스파이럴,플랙시블,바지덕트 등)	14,269
	화장실 청소도구함 설치(17개)	본관 2~11층 B,C존	7,035
	열린민원실 급배수설비	본관 1층 열린민원실	6,674
	소방 지적사항 등(122개소)	서소문청사	10,543
	음수대배관 등 설치공사	청계별관 14층	3,128
	소방 지적사항 공사(18개소)	본관 지하2,3,9,12,13층	1,209
	도서관 카페 소방공사	서울도서관 5층	7,051
	스튜디오 소방공사	본관 4층	3,316
	급배수 씽크, 음수대 배관공사	청계별관 4,5층	6,692
	계		90,616
간접비	경비(보험 포함) 등		11,176
	일반관리비		6,108
	이윤		10,830
	사급자재	음수대 15대	31,500
	계		59,614
부가세	계		15,023
합계			165,253

□ 기성금 신청내용

○ 선금급 지급 : 해당없음

○ 기성내용(계약금액 대비 75.04%)

(단위 : 천원)

구 분	계약금액	전회기성금액	금회기성금액	미지급
총 공사비	220,230	0	165,253	54,977

□ 검토의견

○ 2016년도 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가)』추진 중 시공사에서 제출한 공사 완료 부분에 대한 기성금 신청을 검토한 바,

○ 소방, 급배수 설비 등 청사 유지관리공사의 75.04%에 해당하는 사항을 완료하였으므로 부분 준공 처리코자 함.

붙임 : 1. 기성금 신청내역서   1부.

2. 물량확인서          1부.

3. 공문                1부. 끝.