문서번호	토목과-8101
결재일자	2016.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
최영기		백원기		박주완		07/19 김재겸
협조
	재무과장		김성철
	계약팀장		김종수

★ ◉

『사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사』

설계변경(제3회) 시행 및 준공기한 연기 보고

2016. 7.

	성 동 구
	(토 목 과)

『사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사』

설계변경(제3회) 시행 및 준공기한 연기 보고

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명: 사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사

❍ 위    치: 사근동길(한양대병원 삼거리 ~ 사근삼거리)

❍ 공사기간: 2015. 7. 27. ~ 2016. 7. 25.

❍ 공사규모: 보도블록 포장 정비 16a, 도로경계석 및 측구 정비 842m

아스팔트 포장 정비 7a,  수목식재(왕벚나무 26주) 등

❍ 도 급 비: 346,419천 원

❍ 계약상대자: (주)이든공영 대표 이홍직

Ⅱ		보 고 내 용

❍ 설계변경 내용

- 설계변경 사유: 주민 요구사항 조치(수목 추가 식재)에 따른 목적물량 증 ‧ 감 및 계약금액 조정 점검 시 지적사항에 따른 제경비 조정

- 주요 변경내용

· 사철나무: 150주 → 350주

· 화살나무: 120주 → 320주

· 제경비 조정: 산업안전보건관리비 부적정 정산금액 감 조정

- 설계변경 내역(내역변경)

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총공사비	522,441,780	522,441,780
도 급 비	346,419,000	346,419,000
관 급 비	134,399,780	134,399,780
이 전 비	41,623,000	41,623,000

❍ 준공기한 연기

- 본 공사의 동일 구간 내 ‘사근동길 전기 및 통신선로 지중화 사업’ 추진에 따른 절대공기 부족으로 준공 연기가 불가피함.

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 상기 보고내용과 같이 공사 시행에 따른 변경사항에 대하여 설계변경을 시행코자 하며

❍ 절대공기 부족에 따른 본 공사의 준공기한을 연기하고자 함.

- 준공기한 연기

· 당초: 2016. 7. 25. → 변경: 2017. 7. 25.

- 준공기한 연기 귀책 계약당사자: 성동구청

- 지체상금 부과 여부: 미부과

붙 임   1. 설계변경(제3회) 설계서 1부.

2. 제비율 검증 확인서 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.