문서번호	행정운영과-8531
결재일자	2016.7.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
나동안		유정상	07/20 정진일
협 조

설계변경 검토 보고

(본부 조명등 교체 전기공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

설계변경 검토 보고

(본부 조명등 교체 전기공사)

본부 조명등 교체 전기공사를 완료하고 수량 및 보험료 미가입등 변경 사항에 대하여 아래와 같이 설계변경하여 준공처리코자 함.

□ 공사개요

◯ 공 사 명 : 본부 조명등 교체 전기공사

◯ 공사기간 : 2016. 5. 12 ~ 2016. 8. 18

◯ 계약금액 : 금52,197,593원

◯ 계 약 자 : ***************

◯ 공사계약 내역 : - LED조명등 40W외 13종 742등 설치

- 가로등주 교체 9본

□ 설계변경 내역

○ 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공급 가액	47,452,357	44,775,000	△2,677,357
	부가가치세	4,745,236	4,477,500	△267,736
	소계	52,197,593	49,252,500	△2,945,093
관급 및 사급 자재비		50,621,880	50,621,880
총 공사비		102,819,473	99,874,380	△2,945,093

○ 변경사유

- LED 조명등설치 감량 28등(설치수량 조정 5등, 집계수량 오차 23등)

- 공사원가 사항중 보험료(1,502,441원)가 반영되었으나, 보험 미가입으로 감액조치후 원가계산 비율에 의거 설계변경 실시

※ 건강보험료 593,802원, 연금보험료 869,745원, 노인장기용양보험료 38,894원

- 가로등주 1본 이설

○ 세부 물량 및 금액 변경사항 : 첨부 내역서 참조

○ 예산과목

- 일반관리비(기본경비), 수선유지교체비(시설장비유지비)

□ 행정사항

○ 상기 변경 내용으로 설계변경 시행하고자 함

붙   임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 고용 및 산재보험료 완납증명원 1부.

3. 안관리비 사용내역 및 영수증 1부.

4. 합의서 1부.  끝.