보  고  서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이승환	김기상	02/17 장시명

제 목 : 급수공사 연기 보고

============================================================

명에 의하여 관악구 봉천동 급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항으로 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	관악구 청룡동 1564-12	D=40mm, L=10m	신설-261
2
3
4

▢ 보고 내용

○ 상기 작업지시에 의하여 급수공사 작업지시를 하였으나, 공사현장에 수요가측 자재적치로 인하여 건축공사가 지연됨에 따라 공사기한 내 급수공사가 불가능하여 가능한 시기까지 부득이 준공기한을 연기하고자 함.

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-261	’14.02.14 ~ ’14.02.21	’14.02.14 ~ ’14.03.10

붙임 : 급수공사 연기원 1부(별첨).  끝.