투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 문화재보수정비(총액계상) 국고보조금 사업내용 변경 요청

1. 문화재청 기획재정담당관-3861(2015.12.30), 서울특별시 역사문화재과-12015(2016.1.4)의 관련입니다.

2. 서울특별시(서울역사박물관)에서 관리하고 있는 경희궁지 내 2016년도 문화재보수정비(총액계상)사업 국고보조금 교부 결정 내용과 관련하여 당초 사업내용을 다음과 같이 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 교부내용

1) 대상문화재명 : 경희궁지

- 소재지 : 서울특별시 종로구 신문로2가 1-126

2) 교부 결정 금액 : 500백만원

- 국  비 : 350백만원

- 시  비 : 150백만원

3) 사업내용 : 수목보존, 배수로정비

나 . 변경사항

1) 사유 : 현재 복원된 경희궁 만 우리 박물관에서 관리하고 나머지 경희궁지는 종로구청에서 관리하고 있으며, 종로구청에서 서울시 공원관리 예산으로 외곽 배수로 공사를 시행(현상변경 허가를 득함)하고 있으며, 상기 국고보조금 예산으로는 우리박물관에서 관리하는 경희궁 내부 와 방공호 부근 배수로를 정비하고, 잔여예산으로는 2015년도 숭정전 정밀안전진단 용역 실시결과에 따른 보수·보강 비용 약 6천만원이 필요하여 사업내용을 변경코자 함.

2) 사업내용 변경내역

- 변경전 : 수목보존, 배수로정비(500백만원)

- 변경후 : 수목보존(250백만원), 배수로정비(190백만원), 숭정전 보수·

보강(60백만원).

붙임 1. 숭정전 정밀안전진단 결과보고 1부.

2. 숭정전 정밀안전진단 1부(별도).

3. 종로구 시공원(경희궁공원)보수정비사업 1부(별도). 끝.

	서울역사박물관장
수신자	문화재청장(보존정책과장),서 울 특 별 시 장(역사문화재과장)
주무관	곽순길		시설과장	오삼록		경영지원부장	07/20 나병우
협조자
시행	시설과-3774	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	www.museum.seoul.kr
전화	02-724-0123	/전송	02-724-0244	/	soongilk@seoul.go.kr	/	대시민공개