문서번호	교통지도과-18919		주무관		주차기획팀장		교통지도과장		안전건설교통국장
			지태진		김완배		代김완배		07/20 김해성
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개
			협 조

준공기한 연기 검토보고

안전건설교통국

(교 통 지 도 과)

『구의2동 주택가 공동주차장 건설공사』

준공기한 연기 검토 보고

『구의2동 주택가 공동주차장 건설공사』와 관련하여 작업기간 빈번한 우천 및 민원처리로 인하여 절대공기가 부족함에 따라 관련 공사 및 용역준공기한을 연기코자 함

Ⅰ	사업개요

(단위:원)

발주처	구분	계약건명	계약업체	계약금액	계약 년월일	착공 년월일	준공기한	계약번호
광진구	공사	구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 (장기계속공사)	㈜대경공영 대표 이성칠	2,624,000,000 (총부기금액) 1,467,185,860 (1차)	2012. 12.26	2012. 12.27	2016. 7.31	20121*******09
		구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 (장기계속공사)-2차		638,459,300 (2차)	2013. 12.30	2014. 1.3	2016. 7.31	20131*******05
		구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 (장기계속공사)-3차		518,354,840 (3차)	2015. 12.7	2015. 12.11	2016. 7.31	20151*******02
		구의2동 주택가 공동주차장 건설 소방공사	태양이엔에스㈜ 대표 최광석	193,318,700	2013. 3.22	2013. 3.25	2016. 7.31	20130*******05
		구의2동 주택가 공동주차장 건설 전기공사	동신전기(주) 대표 이현규	122,069,283	2013. 3.22	2013. 3.25	2016. 7.31	20130*******05
		구의2동 주택가 공동주차장 건설 통신공사	제우일렉스(주) 대표 김승환	40,044,100	2013. 3.15	2013. 3.15	2016. 7.31	20130*******05
	용역	구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 감리 용역	㈜종현엔지니어링 건축사사무소 대표 이세권	58,190,000	2014. 6.11	2014. 6.12	2016. 7.31	20140*******03
		구의2동 주택가 공동주차장 소방공사 감리용역	㈜애드세이프 대표 민경실	6,510,000	2014. 5.19	2014. 5.20	2016. 7.31	20140*******03

Ⅱ	관련근거

○ 본 사업 감리용역사인 ㈜종현엔지니어링건축사사무소에서 준공기한 연기검토서 제출【종현(감)-제2016140호】

Ⅲ	보고내용

○ 준공기한 연기사유

- 작업기간 빈번한 우천 및 민원처리, 관급자재 현장납품 지연 등으로 절대공기 부족

○ 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2016. 07. 31

- 변 경 : 2016. 10. 15

○ 연기사유 귀책소재 : 광진구청

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.

Ⅳ	조치계획

○ 구의2동 다가구 밀집지역의 주차난 해소를 위하여 장기계속공사로 시행하고 있는 본 사업에 대하여 작업기간 우천 등으로 공기연장이 불가피하므로 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 준공기한 연장 검토서 1부(별첨).  끝.