문서번호	건축부-9587
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		의료시설과장	건축부장
전재진		김충범	07/21 김진용
협조

「서울시 어린이병원 삼성발달센터」

증축공사 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

도시기반시설본부

건  축  부

「서울시 어린이병원 삼성발달센터」

증축공사 관련 공정회의 결과 보고

□ 사업개요

○ 대지위치 : 서초구 헌릉로 260

○ 규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 11,950㎡

○ 사 업 비 : 312억원 (시비 112억, 기부금 200억원)

○ 설 계 자 : 에이텍종합건축사사무소(주)

○ 감 리 자 : (주)영화키스톤

○ 시 공 자 : ㈜대자개발 외1

○ 공사기간 : ‘15.01.20 ～ ’17.02.19

□ 공정회의 개최

○ 일     시 : ‘16.7.20(수) 11:00~12:30

○ 장     소 : 어린이병원 현장 책임감리원 회의실

○ 안     건 : 부진공정 만회에 대한 실무회의

○ 참 석 자

- 감 리 자 : 감리단장 박찬주외 4인

- 시 공 자 : 현장대리인 강영규외 4인) 등

- 도 기 본 : 건축부 전재진

□ 회의내용

○ 감리단장

- 공정만회에 최선을 다할 것

⇒ 마감공사(철골, 유리, 방수, 수장 등)에 대한 계약 등 준비철저

⇒ 어린이병원에서 내부 칼라에 대하여 변경 검토중에 있으니 사전 협의할 것

⇒ 설계변경(골조, 마감 등) 근거자료 보완

⇒ 안전점검 지적사항에 대하여 조치결과를 금주중으로 제출하겠음

⇒ 계획공정을 만회할 수 있도록 자재 반입 및 인력 투입할 것

⇒ 현장대리인은 현장 공정관리 및 안전사고 예방등에 철저를 기할 것.

○ 시공사

- 공정만회를 하도록 최선을 다하고 있음

⇒ 철골, 유리(자산유리), 방수, 수장, 창호, 도장등 공정에 지장이 없도록 현설등을 실시하여 준비하고 있음

⇒ 일부 토사도 되메우기를 하고 남은 토사는 하도급자와 협의하여 곧바로 반출하겠음

⇒ 지하1층 동바리 정리는 협력업체와 협의하여 주말까지 정리하겠음

○ 도시기반시설본부

- 안전점검 지적사항에 대하여 조치결과 및 대처방안 제출

- 다음주 하도급 감사 대비를 철저히 할것

- 지하1층 동바리를 해체 정리하여 설비, 전기공사의 작업공간을 조성

□ 다음주 계획

○ 매주 수요일 현장에서 공정회의에 참석하여 향후일정 등 업무협의. 끝.