함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(본부 청사 조명등 교체 전기공사)

우리본부에서 시행하는 『본부 청사 조명등 교체 전기공사)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 본부 청사 조명등 교체 전기공사

나. 공사개요 : 조명등 교체 : 714등, 가로등주 교체 : 9본

다. 도 급 자 : ***************

라. 계약기간 : 2016.05.12 ~ 2016.8.18.

마. 변경내용

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증․감
총공사비		102,819,473	99,874,380	감2,945,093
도급비	공사원가	47,452,357	44,775,000	감2,677,357
	부가가치세	4,745,236	4,477,500	감267,736
	계	52,197,593	49,252,500	감2,945,093
관급 및 사급비		50,621,880	50,621,880

바. 설계변경 사유 : 물량 및 보험료 정산

사. 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 수선유지교체비(시설장비유지비)

첨부  1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 사유서 1부.

3) 안전관리비 사용내역 1부.

4) 합의서 1부.

5) 보고서 1부.  끝.

주무관	나동안		행정운영과장	유정상		경영관리부장	07/21 정진일
협조자	주무관	이향란		주무관	전혁
시행	행정운영과-8573	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3146-1132	/전송	02-3146-1132	/	nada0405@seoul.go.kr	/	부분공개(7)