문서번호	원수관리과-1714
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	07/21 박기석
협 조

조류차단막 및 오일휀스 철거완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7

강북아리수정수센터

(원수관리과)

조류차단막 및 오일휀스 철거완료 보고

시설물관리에 만전을 기하고저 취수탑 주변에 기 설치한 조류 차단막 및 오일휀스를 철거하고 보고드림

□ 현 황

○ 계약업체 : 해주이엔씨(주) 대표 백 상 현

○ 계약금액 : 41,306천원

○ 준공기간 : 2016.6.15. ~ 2016.11.15.(철거 및 설치)

□ 철거 공사개요

○ 철거 작업기간 : 2016.7.11.(월) ~ 7.19일(완료)

- 조류차단막 철거 : 355m

- 오일휀스 철거 : 420m

⇒ 2016.7.5.일 철거계획이었으나 강원지역의 많은 비로  팔당댐의 방류량이 급격히 증가(수위상승 6m, 평소방류량 100~200톤에서 11,700톤 증가)하여  조류차단막과 오일휀스 철거작업 지연되었음

□ 물품상태 조사

○ 조류차단막 및 오일휀스

품 명	철거수량	폐기대상	보수대상	재사용 수량
조류차단막	L=355m	L=35m	(L=75m)	320m
오일휀스	L=420m	L=40m	-	380m

- 폐기 : 조류차단막 연결고리및 차단막훼손으로 사용불가

- 보수하여 재사용 : 조류차단막 부력카바 깨짐 및 연결고리 파손 등

□ 조치계획

○ 조류차단막 부력카바 깨짐 등 훼손으로 교체정비 사용(약 50개)

- 제조업체 아카데미ENG에서 부속자재인 부력카바 구매하여 정비.

- 소요예산 : 약 3,000천원

따로붙임 : 현황사진 1부. 끝.