문서번호	교통행정과-34330
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개

주무관	교통개선담당	교통행정과장	안전건설교통국장		부구청장	구청장
안병원	김종식	이상수	김화복		김병환	07/21 김영배
협 조	공원녹지과장			장용수
	교통지도과장			임장식
	도로과장			송기민
	조경담당			김성기
	주차관리담당			박선희
	보도관리담당			김제권

서울시 생활권 도로다이어트 사업‘오패산로 3길’ 시행계획

2016. 7

안전건설교통국

교통행정과

서울시 생활권 도로다이어트 사업‘오패산로 3길’시행계획

市 공모사업에 선정된 「생활권 도로다이어트사업 ‘오패산로 3길’」의 연내 사업완료를 위해 시행계획을 수립 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 현 황

□ 2016. 1.14 : 서울시,「생활권 도로다이어트 확대 추진」사업지 공모

□ 2016. 1.27 : ‘오패산로3길’ 생활권 도로다이어트 사업 공모 市제출

□ 2016. 2.26~3.7 : 종암경찰서 개선방안 협의, 교통규제심의 요청

□ 2016. 3.16 : 생활권 도로다이어트 추진현황 및 추진계획, 市제출

□ 2016. 3.24~4.19 : 종암경찰서,서울시방경찰청, 교통안전시설 규제심의 가결

□ 2016. 4.29 : 서울시 ‘오패산로3길’ 대상선정, 특별교부금 592백만원 교부

⇒ 경찰 규제심의 완료된 10곳 우선 선정 (총 사업비 45.7억원 교부)

(※종로, 용산, 성동, 광진, 성북, 노원, 구로, 동작, 관악, 강남)

□ 2016. 5.20 : 공모 선정결과 보고(교통행정과-22188)

□ 2016. 6.17 : 월곡1동 및 유관부서, 경찰서 등 사업시행계획 홍보 및 협조요청

□ 2016. 6.17~29 : 기본 및 실시설계 용역 계약심사 완료(감사담당관)

□ 2016. 7.1~7 : 기술용역타당성 심사 완료(서울시 기술심사담당관)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사업 대상지 ❍ 사업도로 : 오패산로3길, L=470m (동신아파트~삼양식품 본사) ❍ 도로폭 약20m (왕복2~４차로) □ 사업 내용 ❍ 도로다이어트 : 왕복2차로로 축소, 보도확폭 ❍ 장애인,노약자 등을 위한 무장애보도 조성 ❍ 도로선형, 속도저감시설 등 사고위험 축소

Ⅲ		설계용역 시행계획

□ 용역명 : 생활권 도로다이어트사업 ‘오패산로3길’ 기본 및 실시설계

□ 용역기간 : 2016. 7. ~ 9. (계약일로부터 60일)

□ 용역비 : 29,559천원(서울시 특별교부금)

□ 계약방법 : 전자공개수의계약

□ 용역수행 자격요건

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법시행규칙   제14조의 요건을 갖추고, 입찰공고일 현재까지 주된 영업소가 서울특별시 내에 소재한 업체

- 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의거 엔지니어링사업자 건설부분(교통, 도로·공항, 조경, 상하수도)신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의하여 동일 분야 등록을 필한 업체

Ⅳ		향 후 계 획

□ 2016. 7. : 기본 및 실시설계 용역시행 (교통행정과)

□ 2016. 7.~8. : 주민설명회 개최 및 주민의견 수렴, 개선(안)에 반영

□ 2016. 7.~9. : 유관부서 개선(안) 검토

□ 2016. 9. : 최종 개선(안) 확정 및 실시설계 완료

□ 2016. 9.~11. : 공사시행(교통행정과, 도로과, 공원녹지과)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 교통행정과 : 설계용역 및 개선(안) 수립 총괄, 공사시행(교통부문)

□ 도로과 : 개선(안), 설계 검토, 공사시행(토목부문)

□ 공원녹지과 : 개선(안), 설계 검토, 공사시행(조경부문)

□ 교통지도과 : 거주자주차계획 검토

Ⅵ		개 선 (안)