문서번호	한양도성도감-7255
결재일자	2016.7.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화기획관
김동욱	代이성산	심말숙		07/22 양현미
협 조

서울 한양도성 정밀실측조사 용역(2단계) 변경계획

2016. 7.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	자문회의 개최
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울 한양도성 정밀실측조사 용역(2단계) 변경계획

『서울 한양도성 정밀실측조사 용역』과 관련하여 관리구간 표지석 설치 수량 등 조정에 따라 용역변경을 시행하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명: 서울 한양도성 정밀실측조사 및 보고서발간 용역(2단계)

○ 용역기간: ’14. 12. 22. ~ ’16. 7. 31.

○ 용역기관: ㈜예그린건축사사무소 민경민

○ 계약금액: 476,616,000원

□ 추진 경위

○ ’14. 12. 22.: 계약 체결 및 착수

○ ’15. 3. 9.: 착수보고 자문회의

○ ’15. 8. 6.: 중간보고 자문회의

○ ’15. 11. 4.: 중간보고 자문회의

○ ’16. 7. 8.: 최종보고 자문회의

□ 변경 사항

○ 과업내용 변경 및 사유

- 관리구간 표지석 설치 수량, 디자인 및 재료 변경

변경 전	변경 후	내 용
		○수량: - 313개 → 281개 ○재료: - 컬러도장 각형관 → 화강석 위 스테인리스 부착

⇒ 현장 확인하여 설치 불가 지역 등을 제외하여 개수를 조정하였으며, 디자인 및 재료가 변경되어 개소당 설치단가가 약 31천원 상승됨(개소당 약 269천원 → 약 300천원)

- 표지석에 QR코드 부착 업무 추가

⇒ 모니터링 시스템과 연계된 QR코드를 관리 표지석에 부착, 별도 추가 비용없이 작업하는 것으로 업체와 협의

※ 전체 설치비용 증감 없음.

○ 용역 기간 및 계약금액 변경: 변경 없음

□ 행정 사항

○ 계약상대자와 변경내용 합의

○ 용역 변경계약 의뢰(재무과).

붙임  1. 과업지시서(변경) 1부.

2. 산출내역서(관리구간 표지)-변경 1부.

3. 산출내역서(정밀실측조사)-변경 1부.  끝.