의원 요구 자료 제출

시 행	역사도심재생과-8957
결재일자	2016.7.22.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		다시세운관리팀장	역사도심재생과장	재생정책기획관	도시재생본부장	결재
이현철		이기원	양병현	강맹훈	07/22 진희선
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 1027번, 조규영의원, 문화체육관광위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

조규영 의원(문회체육관광위원회,더불어민주당)

요구번호 : 1027번

1. 세운재정비촉진지구 추진계획(추진경과, 개요, 향후계획)

2. 세운재정비촉진지구 계획변경 이후, 준공 및 허가된 건물관련 허가
현황(각 건물의 준공시점, 허가시점 등 관련자료 일체)

1. 세운재정비촉진지구 추진계획(개요, 추진경과,향후계획)

○ 세운재정비촉진지구 사업개요

- 위치 : 서울시 종로구 종로3가동 175-4 일대

- 면적 : 439.356.4㎡

- 재정비촉진지구의 유형 : 중심지형(20만㎡ 이상)

- 지정목적

· 세운상가 주변일대 낙후된 지역에 대한 토지의 효율적 이용과 기반시설의 확충 및 도시기능 회복을 위하여 재정비촉진지구로 지정하고 광역적인 계획을 수립함으로써, 도시의 균형발전을 통한 도심상권 활성화를 도모하고자 함

- 시행 방식 : 도시환경정비사업, 도시계획시설사업 등

○ 추진경과

- ′06.10.26. 세운재정비촉진지구 지정(서울시고시 제2006-365호 )

- ′09.03.19. 세운재정비촉진계획 결정(서울시고시 제2009-107호)

- ′09.05.20. 세운1구역 세운초록띠공원 조성

- ′14.03.27. 세운재정비촉진계획 변경결정(서울시고시 제2014-199호)

- ′16.04.07. 세운재정비촉진계획 변경결정(서울시고시 제2016-103호)

※ 세운4구역 촉진계획 변경

○ 향후계획

- 구역별 재정비촉진사업 추진

2. 세운재정비촉진지구 계획변경 이후, 준공 및 허가된 건물관련 허가
현황(각 건물의 준공시점, 허가시점 등 관련자료 일체)

○ 준공 및 허가된 건물 관련 허가 현황

- 준공 현황 해당없음

- 각구역별 허가현황(사업시행인가)

연번	구역명	사업위치 (구역면적)	건립규모	추 진 현 황	추진단계	비 고
1	세운 6-3-1,2	을지로4가 261-4일대 (14,858㎡)	2개동 지하8/지상20층 업무시설 연면적 144,682㎡	· 2014.10.7.~23 : 세운활성화자문 · 2014.11.13. : 촉진계획변경 결정 · 2014.12.02. : 건축심의 · 2015.04.21. : 사업시행인가 · 2015.09.11. : 관리처분인가 · 2016.03.31. : 착공	공사중
2	세운 3-1	중구 입정동 189-1일대 (4,661.2㎡)	지하7/지상20층 업무시설 연면적 48,526㎡	· 2015.01.27 : 세운활성화자문 · 2015.03.06 : 건축심의 · 2015.04.22 : 문화재심의 · 2015.09.09 : 사업시행인가신청 · 2015.12.28 : 사업시행인가	관리처분 계획수립중
3	세운 3-4	중구 입정동 2-4 일대 (4,836.8㎡)	지하7/지상19층 업무시설 연면적 51,557㎡	· 2014.12.09 : 세운활성화자문 · 2014.12.22 : 건축심의 · 2015.02.24 : 문화재심의 · 2015.07.30 : 사업시행인가	관리처분 계획수립중
4	세운 3-5	중구 산림동 250-1일대 (2,195.6㎡)	지하4/지상20층 숙박시설 연면적 19,969㎡	· 2014.12.09 : 세운활성화자문 · 2014.12.22 : 건축심의 · 2015.02.24 : 문화재심의 · 2015.07.30 : 사업시행인가	관리처분 계획수립중
5	세운 3-6	입정동97-4일대(3,851㎡)	지하6/지상20층 숙박시설 연면적 36,429㎡	· 2014.12.09. : 세운활성화자문 · 2014.12.22. : 건축심의 · 2015.02.24. : 문화재심의 · 2016.01.19. : 사업시행인가 신청 · 2016.03.29. : 사업시행인가	관리처분 계획수립중
6	세운 3-7	중구 산림동 275-3 일대 (2,732.3㎡)	지하4/지상20층 숙박시설 연면적 25,044㎡	· 2014.12.09 : 세운활성화자문 · 2014.12.22 : 건축심의 · 2015.02.24 : 문화재심의 · 2015.07.30 : 사업시행인가	관리처분 계획수립중
7	세운 6-2-46 (구 극동극장)	충무로4가 131-6일대 (764㎡)	지하4/지상12층 숙박시설 연면적 4,020㎡	․ 2015.03.20/04.07 : 세운활성화 자문 · 2015.04.27 : 건축심의 · 2015.08.10 : 사업시행인가 · 2015.11.03 : 사업시행변경인가 · 2015.11.25 : 관리처분인가 · 2015.12.01 : 착공	공사중
8	세운 6-2-8	인현동 1가 136-20일대 (1,536.2㎡)	지하3/지상15층 관광숙박시설 연면적 11,773㎡	· 2015.04.07./05.12.: 세운활성화자문 · 2015.09.16. : 건축심의 · 2015.10.01. : 촉진계획변경 · 2015.12.23. : 사업시행인가	관리처분 계획수립중

.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (역사도심재생과)	담당사무관	이기원
	☎ 2133-8511	주무관	이현철
	작 성 일 : 2016.7.22