투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(평생교육담당관)
(경유)
제목	일정변경(설계기간) 알림 및 예산 추가 재배정 요청(모두의 학교)

1. 건축부-9666(2016.7.22)호와 관련입니다.

2. 우리본부가 추진 중인『모두의 학교 리모델링공사 설계용역』과 관련하여 일정변경사항 및 신재생에너지(지열) 시험천공에 필요한 예산 재배정을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 일정변경(설계기간)

- 당초 : `16.3.30~`16.8.26, 변경 : `16.3.30~`16.9.30(증35일)

- 사유 : 3차까지 진행된 자문회의와 주민설명회 등으로 평면확정 지연

나. 향후 추진일정(예정) : 착공(`16.11월), 준공(`17. 7월)

다. 소요예산

구 분	2016년 예산	재배정 예산			비 고
		기 재배정액	금회 요청액	재배정 부서
시설비	3,353,875	287,290	64,350	건축부	지열 시험천공관련

붙임 : 설계용역 실정보고에 대한 검토 보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★전문관	현승주		건축관리과장	곽동호		건축부장	07/22 김진용
협조자
시행	건축부-9673	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2657	/전송	02-3708-2659	/	jhsjmm@seoul.go.kr	/	부분공개(5)