투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지방국토관리청장(하천계획과장)
(경유)
제목	중랑천 공사장 하천점용 허가(변경) 및 공사기간 연장 승인 요청

1. 서울시정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 우리시에서 시행중인 『겸재교 건설 및 연결도로 확장공사』와 관련 주민 편의를 위해 중랑천 엘리베이터 설치를 하고자 따로붙임과 같이 하천점용 허가(변경) 및 공사기간 연장 승인 요청을 하오니 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사

나. 점용위치 : 서울시 중랑구 면목동 1049-110번지 외 10필지

다. 점용목적 : 겸재교 및 중랑천 엘리베이터 설치

라. 시 공 사 : ㈜한진중공업

마. 감 리 사 : ㈜동일기술공사

바. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2008.10.23.~2015.12.31.	2008.10.23.~2016.12.31.
점용면적	9,678[eqn: m ^{2}](영구점용)	9,688[eqn: m ^{2}](영구점용)

붙임 : 하천점용 허가(변경) 신청서(별도송부) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	지풍근		터널건설과장	권혁대		토목부장	07/25 김영수
협조자	주무관	이정원
시행	토목부-15292	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/	jpk3060@seoul.go.kr	/	대시민공개