서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)	1종교량 건설사업관리 감리단
제목	작업기간 연기 승인 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 1종교량 제16-262호(2016.7.19)와 관련입니다.

3. 우리시와 계약체결하여 시행중인 2016년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)의 제14차 작업요청에 대한 작업기간을 다음과 같이 연기 승인함을 알려드리오니 안전 및 공정⋅품질관리에 유념하여 시행하시기 바랍니다.

□ 작업기간 연기 승인 내용

시설물명	작업요청내역	작업기간		사 유
		당 초	변 경
신정교,도림천 고가 등	단면보수, 신축이음부 유도배수재 설치 등	‘16.5.19 ~ 7.30	‘16.5.19 ~8.31	16차 작업과 동일한 교량으로 직업병행 시행 및 기 보수 작업요청 우선 처리 등으로 작업기한 연장

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주) 천일 대표이사(1종교량 건설사업관리 감리단),유일환경건설(주) 대표이사
주무관	김근섭		강남일반교량팀장	정회평		교량안전과장	전결 07/25 박문희
협조자
시행	교량안전과-13456	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02)2133-1974	/전송	02)2133-1429	/	kgs727@seoul.go.kr	/	대시민공개