보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	손현정	이경희	07/25 최철민

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여  급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	**************	D=15mm, L=0.5m 부설	신설-43번
	이하여백

▢ 보고 내용

○ 상기 기존건물 수전분리 급수공사 작업지시를 하였으나, 내부배관 미분리로 인해

수요가가 급수공사 연기원을 제출하여 불가피하게 급수공사를 연기하여야 할 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 기존건물 수전분리 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-43번	’16.07.11 ~ ’16.07.21	’16.07.11 ~ ’16.08.10
	이하여백

붙임 : 상수도공사 연기원 각 1부.(별도첨부)  끝.