문서번호	시설과-5507
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
오영근		강민수	07/25 김재균
협조

『2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(1차) 검토보고

2016.07.

중부공원녹지사업소

시설과

『2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(1차) 검토보고

「2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가)」의 3차 작업지시 완료에 따른 작업물량 변경 및 신규 공종 추가로 인한 1차 설계변경 사항 보고 임.

공사개요

공 사 명 : 2016년 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : ㈜한빛파워텍  (대표 : 강문식)

공사금액 : 금105,924,810원

계약일자 : 2016.03.14.

착공일자 : 2016.03.14.

준공기한 : 2016.12.31.

설계변경 주요사유

변경근거 : 시설과-5252(2016.7.15.) 작업지시(3차) 완료보고

- 팔각광장 진입로 열선보수 등으로 인한 작업 물량 변경.

- 기타 전기시설물 보수작업으로 인한 신규 공종 추가 등.

설계변경 내용

설계변경 금액                                              (단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증감	비고
		금 액	금 액
도급비	공 사 원 가	96,295,282	96,295,282	-
	부 가 가 치 세	9,629,528	9,629,528	-
	계	105,924,810	105,924,810	-

※신규 공종 물량이 추가되었으나 계약 물량 변경으로 계약금은 변동 없음.

조치의견

상기 계약금 변동 없이 정산 설계변경(1차) 시행하고자 함.

첨부 : 설계변경 내역서 1부. 끝.