투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	개화차량기지 증설 유치선 관리운영 및 시설물 인수인계 관련 회의 참석 요청

1. 교통정책과-14349(2016.7.11.)호와 관련입니다.

2. 현재 9호선 개화차량기지 유치선 증설사업 진행현황은 아래와 같습니다.

업무구분	준공기한	현재 시공 상황	비고
차량구매	2017.12.31.	20량(5편성) 반입완료 16량(4편성) 시운전 완료 단계
궤도공사	2016.08.04.	- 총23선 공사완료 단계	시설물 점검 및 인수인계 필요
전차선공사	2016.12.31.	남측 8선 공사완료 북측15선 공사 중
신호공사	2017.12.31.	선로전환기 총23개 설치완료 남측 8선 케이블공사 중 전자연동장치 S/W 분석중

3. 위와 관련 증설 유치선 관리운영자 결정 및 시설물 인수인계 관련 회의를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▶ 일시 : 2016.07.26.(화) 14:00

▶ 장소 : 개화차량기지 시스템감리단 상황실(검사고 창고 2층)

▶ 참석 : 도시교통본부 교통정책과(김치훈 주무관)

9호선 1단계 SPC 및 운영사 시설물 운영책임자

9호선 2,3단계 운영사 시설물 운영책임자

도시기반시설본부 궤도과장, 신호과장, 차량과장, 송변전과장 외 담당 주무관

현대로템 및 유치선 증설공사 시공사/책임감리원.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시메트로9호선(주)-SPC민자사업자 귀하,서울시메트로9호선(주)-1단계운영사 귀하,서울메트로사장,서 울 특 별 시 장(교통정책과장)
주무관	박지웅		신호과장	김영하		도시철도설비부장	전결 07/25 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-8087	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 8층 신호과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7329	/전송	772-7308	/	elecpass@seoul.go.kr	/	부분공개(5)