투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	전기공사(1차분) 공사기한 연기 요청(염창2 외 1개소 빗물펌프장 전기공사)

우리 본부에서 추진하고 있는 『염창2 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』의 1차수 계약에 대하여 아래와 같이 공사기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사(1차)

나. 공사기간 : 2013.03.13. ~ 2014.07.30.

다. 계약업체 : ㈜투윈스컴 대표 박성하

라. 1차 공사기한 연기요청 내용

구분	공사금액(원)	공 사 기 한		비 고
		당 초	변 경
총차	392,170,740	’13.03.13.~ ’14.07.30.	변경없음
1차	100,000,000	’13.03.13. ~ ’14.02.28.	’13.03.13. ~ ’14.07.30	증152일
2차	292,170,740	-	-	향후 계약분

마. 연기사유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따른 전기공사 작업시기 미도래

바. 계약금액 및 수량 : 변경없음

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 계약방법 : 장기계속

따로붙임 : 1. 공사기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 동의서 및 계약서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	권오식		설비부장	02/17 박기형
협조자
시행	설비부-1827	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개