문서번호	설비부-1815
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		권오식	02/17 박기형
협조
	경리과장		최영미

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』

2차 공사 및 관급자재분 발주계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』

2차 공사 및 관급자재분 발주계획 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인 『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』 의 2차분 발주를 위한 검토 보고임.

공사개요

○ 공 사 명 : 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사

○ 규    모 : 수배전반 개량(염창2-4,000KVA×2대, 방화 – 2,500KVA×2대)

○ 공사기간 : 2013.03.13 ~ 2014.07.30.(1차 ‘13.03.13 ~ ’14.02.28)

○ 시공사 및 납품사 : ㈜투윈스컴, ㈜에너솔라, ㈜유성계전,(사)시민참여복지회

○ 감 리 사 : ㈜신화이에프원

관련근거

○ 신화 #######1호(2014.02.11.)호 전기공사 및 관급자재 2차 분 계약요청 검토보고

○ 신화감 제2140213(22)호(2014.02.13.)호 감리용역 2차계약 요청

검토내용

○ 공사금액 및 공사기한 – 계약업체 : (주)투윈스컴

공사명	차수	계약금액(원)	공사기간	비고
염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사	총 차	392,170,740	2013.03.13.~2014.07.30
	1 차	100,000,000	2013.03.13.~2014.02.28
	2 차	292,170,740	착공일로부터 2014.07.30까지	금차 발주

○ 관급자재 금액 및 납품기한

▶ 염창2 빗물펌프장 수배전반 – 계약업체 : ㈜에너솔라

건 명	구분	계약번호	납품금액(원)	납기일	비고
수배전반	총차	12132083100	257,000,000	2014.06.30
	1차	12132083100	42,872,200	2014.02.28
	2차	-	214,127,800	착공일로부터~2014.06.30	금차발주

▶ 방화 빗물펌프장 수배전반 – 계약업체 : ㈜유성계전

건 명	구분	계약번호	납품금액(원)	납기일	비고
수배전반	총차	12132076600	224,400,000	2014.06.30
	1차	12132076600	149,094,000	2014.02.28
	2차	-	114,411,000	착공일로부터~2014.06.30	금차발주

▶ 염창2, 방화 빗물펌프장 계측제어장치 – 계약업체 : (사)시민참여복지회

건 명	구분	계약번호	납품금액(원)	납기일	비고
계측제어장치	총차	2013073316700	99,500,000	2014.07.30
	1차	2013073316700	36,268,480	2014.02.28
	2차	-	63,231,520	착공일로부터~2014.07.30	금차발주

○ 감리용역 금액 및 용역기한 – 계약업체 : (주)신화이에프원

공사명	차수	계약금액(원)	공사기간	비고
염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사 감리용역	총 차	75,924,420	2013.05.23.~2014.08.15
	1 차	30,000,000	2013.05.23.~2013.12.31
	2 차	45,924,420	착공일로부터 2014.08.15까지	금차 발주

○ 예산검토

- 예산과목

▶ 염창2 : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 염창2 빗물펌프장 시설용량 증대 ,시설비 및 부대비, 시설비(401-01), 감리비(401-02)

▶ 방화  : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 염창2 빗물펌프장 시설용량 증대 ,시설비 및 부대비, 시설비(401-01), 감리비(401-02)

- 예산현황(2014년)

펌프장명	총계(천원)	시설비	감리비	비고
염창2	1,600,000	1,558,000	42,000
방화	500,000	496,000	4,000

조치의견

○ 염창2, 방화 빗물펌프장 증설 사업기간내 전기공사의 잔여분을 원활하게 추진하기 위하여 전기공사, 관급자재 및 감리용역에 대한 2차 분을 검토내용과 같이 발주함이 타당하다고 판단되며,

○ 건설총괄부에 2차 분 계약을 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 책임감리원 검토보고서 1부. 끝.