서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	(주)온누리태양에너지****************************
(경유)
제 목	서대문청소년수련관 태양광 발전 미가동기간(발전량감소) 손해보전 요청 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 태양광 발전관련 2016.7.8. 내용증명과 관련입니다.

3. 우리시 서대문청소년수련관 외벽 석면제거를 위해 불가피한 시설공사로 수련관 옥상에 설치되어 있는 귀사의 태양광 발전시설 일시 중단(5.16. ~ 7.8.)으로 인한 손해 발생에 대해 심심한 위로를 드립니다.

4. 그러나, 귀사와 우리시 간 2013.7.17. 체결한 “서울시 태양광발전소 건설사업 실시협약서” 제18조 제2항 협약으로 인해 발전시설의 가동 중단으로 인한 손실 보전은 사실상 불가함을 알려드립니다.

서울시 태양광발전소 건설사업 실시협약서 제18조 제2항

- 발전소 운영이 중지되는 경우는 동기간은 “설치공간 사용료” 산정기간에 산입하지 않으며 사용중지 기간이     2개월을 초과할 경우 그 기간만큼 사업기간은 자동 연장된다.

5. 다만, 철거·복구비용은 우리시 예산으로 조치할 계획이며, 발전이 중단 되었던 54일간에 대하여는 “서울시 태양광발전소 건설사업 실시협약서” 제18조 제2항에 따라 계약기간을 연장해 드릴 수 있음을 알려드리오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

	서 울 특 별 시 장
주무관	차인석		청소년시설팀장	최형대		청소년담당관	07/25 박대민
협조자
시행	청소년담당관-13509	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동, 서울시청 서소문별관)	/
전화	02-2133-4126	/전송	02-768-8829	/		/	부분공개(6)