문서번호	정수시설과-2883
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		윤종민	07/25 최석기
협 조

전기설비 보수공사(연간단가) 1차 설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 보수공사(연간단가) 1차 설계변경 시행 보고

우리 정수센터 전기설비의 효율적인 유지보수를 위한 전기설비등 보수공사(연간단가) 시행 중 물량 증·감 및 추가사항이 발생 하였기에  아래와 같이 설계변경 시행하고자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 2016년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 사업기간 : 2016. 4. 01. ~ 2016. 12. 31

◯ 계약금액 : 금62,799,750원

◯ 계 약 자 : 광원전설(주) 대표 김영선

◯ 정비공사 계약 내역

- 접지봉설치 16mm x 1800mm 1본외 1건

- 난연PVC 절연 접지용전선 500m 외 2건

- 가교폴리에틸렌 케이블 2.5sp 2c 외 11건

- 리그단자 1Hole 외 2건

- 제어케이블 2c외 5건

- 콘센트 외 4건

- 조명기구 및 전선관 및 전기수리 자재

□ 작업지시 현황

◯ 1차 작업지시 내용 : 배출수처리장 판넬 교체 및 인입선교체 외4건

※ 세부 작업지시내용은 첨부 작업지시서 참조

Ⅱ		설계변경 사항

□ 주요 변경 내역

○ 원활한 시설물유지관리 및 수질관리를 위한 시설개선

- 배출수처리장 판넬 교체 및 인입선 교체

- 2층 온풍기 전원 공급

- 등기구 신설 2개소

- LED 조명등 15등 설치

- 외등공사 2등

- 3로 스위치 설치등

○ 완재품은 사급자재로 전환

- 분전반 및 제어반

- LED 전등

□ 총괄변경 내용

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

○ 세부 물량 및 금액변경사항 : 첨부 내역서 참조

○ 변경내역 – 계약금액 변경없음

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	57,090,682	57,090,682	-
부가가치세	5,709,068	5,709,068	-
도급금액	62,799,750	62,799,750	-

Ⅲ		조치계획

□ 상기 변경 내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최코자  하며, 심의결과에 따라 설계변경 시행하고자 함

□ 작업완료한 사항에 대해서는 정산 및 대가(기성집행)지급 하고자 함

□ 예상치 못한 전기고장으로 인한 신규 공종이 대폭 증가하여 이로 인한 작업 시행 사항이 발생되어 설계변경하여 전기설비 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함

붙   임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 1차 작업지시서 1부.  끝